투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	단가계약 물품 변경구매-자전거도로 업그레이드공사

1. 시설관리과-3466(2015.11.21.)호 관련입니다.

2. 시설관리과에서 시행하고 있는 「한강공원 자전거도로 업그레이드공사」에 사용되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 변경구매 하고자 합니다.

가. 변경내역

납품 요구번호	품명	규격	물품 식별변호	단위	당초		변 경		증 감
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
12-15-1- 26499-01 (신규구매)	스틸그레이팅	500*395 (뚜껑)	21228607	개	35	724,500	46	952,200	증11	증227,700
	스틸그레이팅	510*410 (받침)	21228608	개	35	371,000	46	487,600	증11	증116,600
	조달수수료					5,910		7,770		증1,860
	합계					1,101,410		1,447,570		증346,160
12-15-1- 29152-00 (변경구매)	흄관	D300	20979978	본	15	736,500	62	3,044,200	증47	증2,307,700
	조달수수료					3,970		16,430		증12,460
	합계					740,470		3,060,630		증2,320,160

나. 변경사유 : 소요물량에 변경에 따른 관급자재 변경구매.

붙임 변경요청서 1부.  끝.

주무관	이규옥		총무과장	11/27 최대봉
협조자
시행	총무과-19983	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0713	/전송	02-3780-0740	/	santamam@seoul.go.kr	/	대시민공개