투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재(미끄럼방지포장재-천일초교사거리외 3개소) 납기 연기 요청

1. 도로보수과-7482호(2015. 10. 14)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『2015년 노후포장도로 정비공사』에 소요되는 관급자재(미끄럼방지포장재-천일초교사거리외 3개소)를 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 미끄럼방지포장재(천일초교사거리외 3개소)구매(2015년 노후포장도로정비공사)

나. 계약일자 : 2015. 10. 19.

다. 계약당사자 : 화성이앤씨(주) 대표 하용호

라. 변경내용

납품요구번호	물품식별 번 호	품명 및 규격	단위	수 량	납품기한		비고
					당초	변경
12-15-1-49904-00	22082013	미끄럼방지포장재 HA-1225, t3.0~4.0mm	㎡	413	2015.11.30	2015.12.28

끝.

	도로보수과장
주무관	송광석		도로보수과장	11/27 김환겸
협조자
시행	도로보수과-8955	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02) 2040-0340	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개