문서번호	급수운영과-31739
결재일자	2015.11.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
최호림		김태형	11/27 최명익
협 조

설계변경 심의 위원회 개최 결과보고

(동일로 송배수관정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11.

동부수도사업소

급수운영과

『동부수도사업소 동일로 송배수관정비공사』

설계변경 심의 위원회 개최 결과보고

우리 사업소에서 시행중인 『동부수도사업소 동일로 송배수관정비공사』 에 대한 설계변경 사전 심의 위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		공사현황

가. 공 사 명 : 동부수도사업소 동일로 송배수관정비공사

나. 도 급 자 : **************

다. 공사기간 : 2015.06.09. ~ 2015.11.30.

라. 변경금액 내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
총 공사비	**************	**************	**************
도 급 비	**************	**************	**************
관 급 비	************	************	**************

Ⅱ		심의 위원회 개최현황

가. 개최일자 : 2015. 11. 27.(금)  10:30

나. 개최장소 : 3층 회의실

다. 참석위원 : 급수운영과장 외 5명

라. 검토내용

- 신규공종 단가적용 적정여부

- 제잡비율 적용 적정여부

- 시공물량 증․감 내역 확인

- 설계변경 내역 적정여부

마. 검토결과 : 위 검토내용에 대하여 적정하다는 심의의견을 제시함.

Ⅲ		향후계획

상기와 같이 설계변경 심의 위원회 개최결과 심의위원 모두 적정의견을 제시하였으므로, 이를 설계변경 내역에 반영하여 서울시 재무과에 변경계약 의뢰하고, 향후 정산시행 하고자 합니다.

붙임문서 : 1. 설계변경 심의 의뢰서 1부.

2. 설계변경 사전심의 의결서 1부.  끝.