문서번호	건축부-13519
결재일자	2015.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
김희태		代전재진	11/27 안재혁
협조

『중랑물재생센터 시설현대화사업 전력공급공사』

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

「중랑물재생센터 시설현대화사업 전력공급공사」

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

「중랑물재생센터 시설현대화사업 전력공급공사」건축분야와 관련 책임감리원으로부터 제출된 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 지적사항에 대한 조치결과 보고

1		검토근거

○ 건축부-12728호(‘15.11.11) : 설계변경자문 소위원회 개최 결과 통보

○ 한종(중랑)감 제15-410호(‘15.11.27) : 설계변경소위원회 자문결과 조치보고

2		검토보고 내용

○ 검토보고 사유

- 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 용마루 경사도 조정, 누락사항 등에 대한 조치

- 단가 적용기준, 물가정보 등 첨부검토 등 지적사항에 대한 조치결과 보고서가 제출됨

○ 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 조치 내용 : 별첨

3		검토의견

○ 중랑물재생센터 시설현대화사업 전력공급공사의 설계변경 자문회의 결정사항을 수용

- 지적사항 조치 및 단가 재검토

구분	당초	변경	증감	비고
공사비	392,000,000	366,000,000	감26,000,000

4		처리의견

○ 설계변경 자문(결정)결과 지적사항 조치이행 등 보고사항이 적정하므로 동 내용을 승인처리하고, 향후 설계변경토록 통보하고자 함

붙임 : 설계변경 소위원회 자문결과 조치보고서 1부.  끝.