투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(918공구 건설공사, 7차2회)

1. 우리 본부에서 시행중인 『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

나. 계 약 자 : ㈜SK건설공사 대표이사 조기행

다. 변경내용

(단위 : 백만원)

구분	계약금액			용역기간	비고
	당초	변경	증감
7차2회	21,500	21,500	-	‘15.02.13. ~ ’15.12.31. (변경없음)

라. 변경사유

- 건축, 기계, 전기분야 착공시기를 ‘15년07월로 계획하였으나 9호선3단계 전체공정추진에 맞게 건축, 기계, 전기 착공시기 ‘16년(8차) 발주로 조정

- 기 발주된 건축, 기계, 전기분야 발주금액을 토목분야로 대체 시공함에 따른 공사구간 위치 및 계약내역 변경

마. 예산과목

- 특별회계 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 시설비

첨부 : 1. 계약 내역조정에 따른 검토보고 1부.

2. 설계변경 감리검토서 1부.

3. 변경설계서 1부(종이문서 별도발송).

4. 변경현황도 1부.

5. 합의서 1부. 끝.

	도시철도토목부장
주무관	서재원		주무관	문병종		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	11/27 김진팔
협조자	기획예산과장	안순봉		경리과장	박환
시행	도시철도토목부-15047	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7125	/전송	02-772-7306	/	seojw83@seoul.go.kr	/	부분공개