함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(등촌동 640~81-1번지외 1개소 간선배관 부설공사-최종)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『등촌동 640~81-1번지외 1개소 간선배관 부설공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 등촌동 640~81-1번지외 1개소 간선배관 부설공사

나. 공사기간 : 2015. 04. 21 ~ 2015. 11. 30

다. 도 급 자 : 하송종합건설(주) 대표 장범식

라. 계약금액 : 145,138,000원

마. 설계변경 사유 : 계약물량 증․감 및 신공종발생

바. 예산과목 : 자본적지출, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(간선배관공사)

사. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	비 고 (증 ․ 감)
총공사비	397,987,590	331,381,000	-66,606,590
도 급 비	158,377,590	145,138,000	-13,239,590
관급자재비	158,610,000	105,243,000	-53,367,000
도로복구비 및 기타	81,000,000	81,000,000	-

따로붙임   1. 설계변경계획(최종) 및 설계변경 심의위원회 개최결과 각 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의 결과서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

주무관	정수용		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	이자원		강서수도사업소장	11/27 이상래
협조자
시행	시설관리과-25602	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목돋동로 155	/
전화	3146-4021	/전송	3146-4039	/	yong1492@seoul.go.kr	/	대시민공개