투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(2015년 홍제천 및 지천관로 보수공사-2차)

1. 물재생과-4958(2015.11.26.)호와 관련 『2015년 홍제천 및 지천관로 보수공사-2차』 건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결되었음을 알려드립니다.

가. 건  명 : 2015년 홍제천 및 지천관로 보수공사-2차

나. 계약일 : 2015. 06. 12

다. 변경계약일 : 2015. 11. 27

다. 계약업체 : 소니종건㈜  대표 유연학

라. 계약금액 : 금592,309,100원(금오억구천이백삼십만구천일백원)

(변동없음)

마. 변경전 준공기한 : 2015. 12. 11

바. 변경후 준공기한 : 2015. 12. 31

사. 변 경 사 유 : 공사구간 연장에 따른 공사기간 연장.

붙임 : 1. 공사변경계약서 1부.

; 2. 설계변경 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	지두연		관리과장	이재성		난지물재생센터소장	11/27 가길현
협조자
시행	관리과-11798	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/
전화	02)300-8516	/전송	02)300-8518	/	nanji71@seoul.go.kr	/	부분공개(7)