문서번호	도로계획과-4487
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로계획팀장	도로계획과장
정재훈	최연호	11/27 최동필

- 태릉~구리IC간 광역도로확장 기본계획 용역 -

설계변경(정산) 검토보고

2015. 11.

도시안전본부

(도로계획과)

- 태릉~구리IC간 광역도로확장 기본계획 용역 -

설계변경(정산) 검토보고

태릉~구리IC간 광역도로확장 기본계획 용역과 관련하여 설계변경(정산)에 대한 검토보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 태릉~구리IC 광역도로확장 기본계획 용역

○ 위    치 : 서울시 중랑구 묵동IC ~ 구리시 구리IC(북부간선도로)

○ 규    모 : 폭 6→8차로, 연장 4.78km

○ 계 약 자 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소

○ 계약금액 : 160,578,000원

○ 용역기간 : 2014.12.22. ~ 2015.11.30.

□ 보고내용

○ 설계변경(정산)

- 당초 160,578,000원 → 변경 159,678,000원

구 분		금 액	증 감
총 용 역 비	당 초	160,578,000원	감 900,000원
	변 경	159,678,000원
공 급 가 액	당 초	143,507,773원
	변 경	143,507,773원
부가가치세	당 초	14,350,777원
	변 경	14,350,777원
자문비 등	당 초	2,719,450원	자문비 감 900,000원
	변 경	1,819,450원

- 변경사유 : 기본계획 용역관련 전문가 자문회의 수당 실 정산에 따른 집행잔액 감 처리

□ 향후계획

○′15. 11월 : 변경 계약 및 용역 준공

따로붙임 : 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.