문서번호	급수운영과-26570
결재일자	2015.11.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
전성호		함현준	11/27 장종욱
협 조
	주무관			김병주

포장복구 작업지시 물량 증감 보고

2015. 11

서부수도사업소

(급수운영과)

2015년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사 중 작업물량 증가 사유가 있어 아래와 같이 보고 합니다.

2015 .  11.  .

보고자 :  직 지방시설주사보  성명 : 전성호

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : (주)해슬이애앤씨 대표 고현문

다. 총부기 계약금액 : 금일십일억육천사백육십팔만삼천육백원정(1,164,683,600)

라. 총부기 계약기간 : 2015.05.11 ~ 2016.05.31

2, 보고내용

가. 망원동 436-29 ~ 436-2호 구간은 노후된 상수도관을 교체하는 공사로 마포구청 토목과 도로점용 허가조건을 차로단위복구로 허가되어 굴착물량보다 포장복구 물량이 아래와 같이 증가되는 실정임

1.공사 물량 증감 및 금액비교
공사명	지시번호	관로복구				관로복구 및 절삭,표층포장				비고
		도종	폭(M)	연장(M)	면적(M2)	도종	폭(M)	연장(M)	면적(M2)
신공덕동외6개동	100-1-523	A2	0.9~2.0	101.20	100.48	A2	0.9~2.0	101.2	100.48
						절삭,표층	2.75	102	280.5
공사명	금액차이	관로복구				관로복구 및 절삭,표층포장				비고
		총공사비		도급비	관급비	총공사비		도급비	관급비
신공덕동외6개동	4,847,000	7,403,000		5,874,000	1,529,000	12,250,000		8,470,000	3,780,000

3, 조치의견

○ 도로관리 및 허가조건에 의거 차로단위 복구로 작업지시코자 합니다.

○ 예산지출 : 자본적지출, 유현자산취득, 구축물,시설비(노후 배급수관)

따로붙임 : 1) 마포구청 토목과 도로점용 허가조건 각1부.

2) 물량증감 내역서 각 1부.   끝.