투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	『2015년 횡단보도 확충정비 사업 교통신호기 공사(2차)』 설계변경(1차-공기연장) 시행(고척우체국 주변)

『2015년 횡단보도 확충정비 사업 교통신호기 공사(2차)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차-공기연장)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2015년 횡단보도 확충정비 사업 교통신호기 공사(2차)

2. 공사기간

- 당초 : 2015.10.15. ~ 2015.11.30.

- 변경 : 2015.10.15. ~ 2015.12.18.

3. 공사위치 : 구로구 고척동 50-65 고척우체국 주변

4. 도 급 자 : 신용통신(주) 대표자 변옥희

5. 설계변경내역 (변경없음)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비	20,305,300	20,305,300	-	변경 없음
도 급 비	20,305,300	20,305,300	-

6. 설계변경 사유 : 본 공사는 횡단보도 신설에 따른 교통신호기 설치 공사로 토목공사 시공 지연에 따른 절대공기 부족함으로 공기연장하여 신속히 공사를 진행하고자 합니다.

7. 예산과목 : 교통운영과, 도로교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리,

보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비

붙임문서 : 1. 방침서 1부.

2. 감리 기술검토의견서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

★주무관	홍승찬		기전과장	11/27 代한영호
협조자	주무관	박태진		주무관	이재민		관리단속과장	이은엽
시행	기전과-15065	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7989	/전송	02-2657-7939	/		/	부분공개(7)