문서번호	설비부-15013
결재일자	2015.11.27.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
박병환	김영수	11/27 박기형

『성암로 병목구간 개선 전기공사』

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『성암로 병목구간 개선 전기공사』

설계변경(정산) 검토 보고

『성암로 병목구간 개선 전기공사』와 관련 아래와 같이 설계변경(정산)사항이 발생하여 보고 드림.

관련근거

○ 설계변경(정산)보고서 제출-- 공사감독3처-11615(’15.11.16)호

공사개요

○ 공 사 명 : 성암로 병목구간 개선 전기공사

○ 위    치 : 마포구 중동 26-16번지 일대

○ 규    모

- 도로확장 2차로 ⇒ 4차로(연장 203m)

- 가로등 31본 설치, 이설 3본, 교통신호기 설치 1식

- 분전반 2면 설치, 신호제어기 2면 설치

- 전기 케이블 및 배관공사 1식

○ 도 급 자 : ㈜세명종합전력  대표 오종국

○ 도 급 비 : 184,412,350원

○ 공사기간 : 2014.04.28. ~ 2015.11.30.

설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 공종 물량 증·감에 따른 설계 변경

○ 설계변경 내용(별첨 설계내역서 참조)

공 종	주요 설계변경 내용	비 고
배관/배선공사	- 전선관 및 전력케이블 물량 감소	감
투광기 12개 설치	투광기 감소(성산자동차학원 공원화 사업 계획에 따라 제외)	감
토 공	터파기 및 되메우기물량 감소	감
광케이블 설치	원인자 공사로 증가(교통정보과)	증
제경비	건강·노인·연금보험료 감소	감
검사비 수수료	전기안전공사 점검비 음향신호기 기능검사비 추가	증

도급비 변경현황

[단위 : 원]

구 분	변 경 현 황		증·감	비고
	당 초	변 경
도 급 비	184,412,350	146,233,000	감38,179,350

예산과목

○ 도로건설(도시개발특별회계), 간선도로망 확충, 성암로 병목구간 개설, 시설비

보고자 검토의견

○ 설계변경(정산) 후 건설총괄부에 변경계약 의뢰 코자 합니다.

붙 임 :  1. 관련공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 검사수수료 1부.

4. 합의서 1부.  끝.