문서번호	토목부-25158
결재일자	2015.11.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	전결 11/27 代서관석
협조
	토목설계과장		이승우

설계비용 반영 검토보고

(여의도 지하 공공보행통로 개선사업)

2015. 11.

토 목 부

설계비용 반영 검토보고

(여의도 지하 공공보행통로 개선사업)

여의도 지하벙커내 설치 시설물(토목, 기계, 전기등)에 대한 설계비용을 반영하고자 검토 보고 드림.

1		사 업 개 요

○ 위    치 : 영등포구 여의도동 23-2 도로 주변

○ 규    모 : 환기구 1개소, 지하 구조물 보수 등

○ 사업기간 : 2015. 7. 20 ~ 9.30

○ 총사업비 : 1,900백만원(주관부서 : 안전총괄과)

○ 설 계 사 : ㈜제일엔지니어링

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단(60%), 동일기술공사(40%)

○ 시 공 사 : ㈜케이에스씨건설외 1

2		주요 추진현황

○ ‘15.06.19. : 기본계획 시장보고 (MP, 안전총괄과장)

○ ‘15.08.05. : 사업추진계획 보고 (행정2부시장 방침 제282호)

※ “양재대로 지하차도 설치 기본 및 실시설계용역”에 포함 추진

○ ‘15.08.05. : 디자인 심의 1차 (유보)

○ ‘15.08.11. : 디자인 심의 2차 (조건부 동의)

○ ‘15.09.15. : 시장보고 [안전총괄과-938호(15.9.17)]

※  16년예산으로 출입구 등 설치로 사업계획 일부 변경

○ ‘15.09.30. : 시설물 보수 완료

○ ‘15.11.13. : 시설물 철거, 보완 (난간철거 및 출입문 설치, 보도보수)

3		검 토 사 항

○ 지하시설물 설계 비용 반영 필요

- 설계비 반영 대상

연번	구분	회사명	요청금액 (단위: 천원)	추진사항
계			85,100
1	토목	㈜제일엔지니어링	61,000	- 구조물 계획, 설계 및 검토 - 설계도면, 수량산출서, 내역서 구조계산서 작성
2	기계설비	㈜트루만	12,000	- 건축, 기계설비 설계
3	전기통신	㈜삼우티이씨	12,100	- 전기, 통신설계

○ 관련규정 검토

1) 토목, 기계 설계비 산정시 적용

엔지니어링 설계요율 적용 (행정2부시장 방침 제10109호 `11.9.5)

※ 기본 및 실시설계 통합발주용역 설계요율표

공사비	분리발주 설계요율(%)		************
	기본설계	실시설계	기본설계·실시설계 동시발주	기본설계없이 실시설계발주
10억원 이하	1.77	3.55	4.61	4.35
20억원 이하	1.63	3.27	4.25	4.00

※ 엔지니어링 사업대가 기준요율 (`14.10.13고시)

구분	공사비	기본설계	적용요율(%)	실시설계	적용요율(%)
건설부문의 요율 [별표 1]	5천만원이하	3.24	3.24	6.49	****
	10억원이하	1.77	1.76	3.55	****
	20억원이하	1.63		3.27

2) 전기 설계비 산정시 적용

전력기술관리법 운영요령 제18조(용역대가의 산출) 설계용역 및 설계감리용역대가는 공사비 비율에 의한 방식을 적용 산출.

공사비가 요율표의 각 단위 중간에 있을 때의 요율은 직선보간법에 의하며 기본설계를 시행하지 않은 실시설계의 경우 실시설계 요율의 1.3배 적용

※ 전력시설물공사 설계 및 설계감리 요율(제18조제2항 관련)

요율 공사비	요 율 (퍼센트)
	기본설계	실시설계	설계감리	계
5,000만원까지 1억원까지 2억원까지	2.14 2.01 1.60	***** **** *****	1.07 1.00 0.80	9.63 9.02 7.20

○ 설계비 검토결과

※ 용역대가의 산출은 공사비 비율에 의한 방식을 적용

협의율 : (양재대로 낙찰율 79.915%+100%)/2=89.958%

구 분	설계사	요구금액(천윈)		검토결과 ************	비고
		공사비 요율방식	실비정액가산방식
토목 설계비	제일	47,000	61,000	- 토목 공사비에 기계(설비) 공사비 합산 토목설계비 1,011,720,000원으로 계상 - 행정21부시장 방침 제10109호 적용 - 직선보간법을 적용 4.35% 요율 반영 - 설계비 산출근거 - 1,011,720,000원×4.35% = 44,009,820원 - 44,009,820×************** = 39,590,353원 ************ ***********(토목설계비+기계설계비)	엔지니어링 사업대가기준
기계 설비 설계비	트루만	9,400	12,000	- 토목 공사비에 기계(설비) 공사비 합산 기계설계비는 토목설계비로 계상하는 것이 타당.(건설부문의 요율 별표1 참조)
전기 통신 설계비	삼우 티이씨	9,470	12,100	- 견적서 전기공사비 151,820,000원을 설계예산서 공사비 85,942,136원으로 계상하여 산출 - 견적서 실시설계요율 4.8%를 직선보간법 적용하여 6.12%로 반영 - 설계비 산출근거 85,942,136원×6.12%×1.3 =6,837,556원 6,837,556원×************** =6,150,928원 *********************	전력기술관리법 운영요령
계		65,870 (부가세 별도)	85,100 (부가세 별도)	45,740,000********* 50,314,000*********

4		검 토 결 과

○ 설계비 검토결과 증액되는 실시설계비 50,314천원(부가세포함)에 대하여 안전총괄과에서 기 방침받은 “양재대로 지하차도설치 기본 및 실시설계   용역”에 반영하는 것이 타당하다는 책임건설사업관리기술자 의견이 적정함에 따라 승인코자 함.

붙 임 1. 관련방침 (행정2부시장방침 제282호) 1부.

2. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

3. 엔지니어링사업 설계요율 적용방법 1부. 끝.