함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경에 따른 계약의뢰(제초작업 및 조경관리용역)

1. 우리 정수센터에서 시행중인  『암사아리수정수센터 제초작업 및 조경관리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 후 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 암사아리수정수센터 제초작업 및 조경관리용역

나. 공사기간 : 2014. 4. 15 ~ 2014. 11. 30

다. 도 급 액 : 112,584,200원

라. 도 급 자 : 세아조경건설㈜ 대표 류길숙

마. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

바. 하자담보기간 : 준공일검사일로부터 1년

사. 설계변경 내역(도급비)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감
도 급 비	112,584,200원	102,608,000원	감)9,976,200원

아. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 보험료 정산

붙  임 : 1) 설계변경 검토보고 1부.

2) 설계변경 방침서 1부.

3) 합의서 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	강희권		정수시설과장	전결 11/24 남효돈
협조자
시행	정수시설과-3551	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131(암사3동)	/
전화	3146-5776	/전송	3146-5707	/	kkaann2@seoul.go.kr	/	대시민공개