문서번호	시설보수과-9985
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식	정재현	11/30 노영석

설계변경(정산) 보고

(정릉천 2복개구조물 정밀안전진단용역)

2015. 11.

북부도로사업소

(시설보수과)

설계변경(정산) 보고

(정릉천 2복개구조물 정밀안전진단용역)

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 정릉천 2복개구조물 정밀안전진단용역

❍ 시설개요 : 폭 20.4~56.55m, 연장 2,466m

❍ 용역기간 : 2015.5.7. ~ 12.15.

❍ 용역금액 : 333,456,000원

❍ 용 역 사 : 에스큐엔지니어링(주), ㈜대한이엔씨

□ 설계변경 사유

❍ 실정보고사항 검토결과 보고(시설보수과-7256, 2015.8.31.)

- 전차와 동일한 위치에 재하시험(구조해석) 1개소 추가 실시

❍ 교량(창동교, 녹천교) 진동에 대한 민원사항 조치 계획(시설보수과-8373, 2015.10.6.)

- 창동교, 녹천교 재하시험(구조해석, 받침조사) 1개소 추가 실시

□ 설계변경 내용

❍ 용역비 변경                                                   (단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감	비고
용역비	공급가액	301,505,455	369,141,818	증)67,636,363
	부가가치세	30,150,545	36,914,182	증)6,763,637
	자문회의	1,800,000	1,800,000	-
	계	333,456,000	407,856,000	증)74,400,000

❍ 주요 변경내역

시설명	공 종	단위	수 량		비 고
			당 초	변 경
정릉천 2복개	재하시험	개소	1	2	증)1
창동교	재하시험	개소	-	1	증)1
녹천교	재하시험	개소	-	1	증)1

□ 조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 설계변경 시행코자 함

따로붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.