문서번호	토목부-25355
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		代강철규	11/30 노우성
협조

보조감리원 투입계획 조정보고

「서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11.

도시기반시설본부

(토목부)

보조감리원 투입계획 조정보고

「서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사」

2015년 전기공사의 잔여공정이 마무리됨에 따라 현재 시설공사가 진행중인 임시가설교량 철거에 보조감리원(전기→안전)을 조정 배치하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

❍ 한종(서빙고)제15-233호(2015.11.30.) 보조감리원 투입계획 조정보고

2		용역개요

❍ 용역명 : 서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사외 1건 통합전면책임감리용역

❍ 규    모

- 기존 고가 철거 B=16.0, L=753m,

- 고가설치 : B=6.4~10.4m, L=115~290m,

- 기존고가 보수․보강 : B=16.0m, L=140m

❍ 용역기간 : 2010.12.31. ∼ 2016. 1.31.

❍ 용역비 : 2,035백만원

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술외 1개사

3		감리단 보고내용

❍ 5차분 감리원 투입현황(‘15.11.30 기준)

구 분		계약(개월)	투입(개월)	잔여(개월)	비고
책임감리원(토목)		12	10	2
보조 감리원	토 목1	12	10	2
	토 목2	1.55	0	1.55
	전 기	3.0	0	2.0	안전감리 1개월 조정
	조 경	1.0	0	1.0
	강 교	8.0	2.32	5.68	완료
	안 전	6.73	7.73	0	전기감리 1개월 조정
	소 계	32.28	20.05	12.23

❍ 본선 임시개통(2015.10.31.)으로 전기공사의 잔여분은 가로등 설치 4본으로          임시 가설교량(#3,4) 철거(‘16년2월) 이후 전기분야 보조감리원 투입이 필요한        실정임(실 공종상 ’16년도 1개월 필요)

❍ 현재 토목공사가 진행중인 임시가설교량 철거현장은 경원선 철도보호구역내에서         작업이 이뤄지는 것을 감안 안전감리 투입이 필요한 실정으로 전기공사 실공종상        불필요한 보조감리원 투입기간을 안전분야 감리원 투입기간으로 조정하여 안전관리에        만전을 기하고자 함

❍ 보조감리원 투입기간 변경계획(안)

구 분		계약(개월)	투입(개월)	잔여(개월)	비고
보조 감리원	전 기	3.0	0	1.0	전기분야→안전분야
	안 전	6.73	8.73	0

4		조치의견

❍ 현 공종상 감리원 투입이 불필요한 보조감리원(전기)을 안전분야 보조감리원으로        조정 투입하여 현재 진행중인 임시가설교량 철거현장의 안전관리에 만전을 기하고자 함

※ 감리비 증액없이 감리원 배치계획(전기분야→안전분야) 조정

❍ 보조감리원(안전) 연장투입 승인내역

성 명	등 급	투 입 기 간		추가금액	비 고
		당 초	변 경
최 형 출	감리사보	‘15. 4. 1. ~‘15. 11. 30.	‘15. 4. 1. ~‘15. 12. 31.	없음	전기보조감리원의 투입계획 조정

붙 임 : 1. 보조감리원 투입계획 조정요청 공문 1부.

2. 보조감리원 투입계획 조정보고 1부.  끝.