문서번호	시설관리과-1047
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
최경호	오준식	조상덕	01/15 전영석

『신림6가압장』

수전전압변경 전기공사 설계용역 발주계획

2014. 1.

남부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『신림6가압장』

수전전압변경 전기공사 설계용역 발주계획

신림6가압장 수전전압변경 전기공사와 관련 설계용역을 시행

하여 전기공사 추진에 철저를 기하고자 함.

□ 근거

○ 전력기술관리법 제11조(전력시설물의 설계도서의 작성 등)

※ 전력시설물의 설계도서는 국가기술자격법에 따른 전기분야 기술사가 작성

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 신림6가압장 수전전압변경 전기공사

○ 사업기간 : 2014.03 ~ 2014. 06

○ 총사업비 : 315,000천원

○ 사업내역

- 특고압 수배전반 11면 및 저압반 7면 철거

- 저압기동반 및 전송반 등 설치 6면

- 관련케이블 철거·설치 1식

- 설계용역 1식

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 신림6가압장 수전전압변경 전기공사 설계용역

○ 용역기간 : 2014. 1. ~ 2014. 2.(20일)

○ 용 역 비 : 8,517천원

○ 용역범위 : 특고압 수배전반 철거, 저압기동반설치 및 관련공사

□ 사업추진계획

○ 설계용역 타당성심사(본청 기술심사 담당관) : 2014.01.16

○ 설계용역 발주 : 2014.01.23

○ 설계심사(본청 계약심사과) : 2014.02.13

○ 발주의뢰(조달청) : 2014.03.03

□ 보고자 의견

○ 기술심사담당관에 기술용역 타당성 의뢰 후 설계용역을 발주하여

조기발주를 실시하여 사업추진에 차질이 없도록 시행코자 함.

첨부 : 1. 기술용역 타당성 심사 요청서 1부.

2. 실시설계용역비 산출내역 1부. 끝.