투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	성창씨엔씨(주) 대표 곽은호 귀하
(경유)
제목	『북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업』 준공기한 연기 통보

1. 시설과-8803(2015.11.27.)호와 관련입니다.

2.『북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업』과 관련하여 다음과 같이 준공기한 연기 통보하오니 북서울꿈의숲 중식당(메이린) 내부공사 공정일정을 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업

나. 공사기간 : 2015.09.14. ~ 2015.12.12.

다. 도 급 비 : 금349,883,010원

라. 도 급 자 : 성창씨엔씨(주) 대표 곽은호

마. 준공기한연기

공 사 명	계 약 일	착 공 일	준 공 기 한		비 고
			당 초	변 경
북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업	2015.09.10.	2015.09.14.	2015.12.12.	2016.02.29.

끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	전지연		시설팀장	한종수		시설과장	11/30 김한준
협조자
시행	시설과-8878	(		)	접수		(		)
우	04628	중구 삼일대로 231 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/		/	대시민공개