함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(2015년 상수도관 전식방지 전기공사)

1. 우리 사업소에서 시행 중인 「2015년 상수도관 전식방지 전기공사」건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2015년 상수도관 전식방지 전기공사

나. 계 약 자 : 태화전기 (대표 김수규, 서울시 동대문구 겸재로 24)

다. 계약기간 : ’15. 8. 3. ~ 12. 2.(120일)

라. 설계변경 사유

- 공사 물량 감소 : 3건

- 기타 경비 정산 : 보험료 3건, 산업안전보건관리비 1건

마. 변경 내역

구 분	당초 금액(원)	변경 금액(원)	증․감	비고
총부기금액	184,055,600	176,090,894	-7,964,706	-

바. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

붙 임  1.  설계변경 시행(공문) 1부

2. 설계변경 보고서 1부

3. 변경계약 내역서 1부

4. 계약변경 합의서 1부

5. 설계변경 사전심의 의결서 1부

6. 설계변경 사유서 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김형구		기전팀장	오준식		시설관리과장	11/30 우종근
협조자
시행	시설관리과-29719	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소	/
전화	02-3146-4617	/전송	02-3146-4639	/	goos@seoul.go.kr	/	부분공개