문서번호	기전과-12028
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	북부도로사업소장
강운규	이영목	11/30 노영석

「2015년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사」

설 계 변 경 계 획 보 고 (4차)

2015. 11

북부도로사업소

기전과

「2015년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사」

설 계 변 경 계 획 보 고 (4차)

도로를 이용하는 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성코자 추진하고 있는 교통안전표지 공사에 ‘15년 교통사고 잦은곳 개선 및 소방관서 긴급출동 신호시스템 예산이 재배정되어 보고함.

관련근거

2015. 7. 13 교통사고 잦은 곳 개선사업 개선설치 통보

2015. 10. 5 제9차 교통안전시설 심의결과 통보

- 2015년 소방관서 긴급출동 신호시스템 관내 2개소 설치

재배정 내역

2015. 9. 16 2015년 교통사고 잦은 곳 개선사업 예산 재배정

2015. 11. 19 2015년 소방관서 긴급출동신호시스템 예산 재배정

(단위 : 천원)

구분	공사명	예산과목	예산 배정액	설계 금액	관급비	비고
합 계			6,200	5,444	756
공사	2015년 교통사고잦은곳개선안전표지공사	도시교통체계및소통개선,교통소통및안전관리강화,교통사고잦은곳개선,시설비	5,500	4,912	588	종묘앞
공사	2015년 소방관서 긴급출동 신호시스템	도시교통체계및소통개선,교통소통및안전관리강화,교통사망사고줄이기사업,시설비 (응급차량접근로개설)	700	532	168	공릉,방학 119안전센타

※ 예산배정액 6,200천원으로 공사비증액 5,444천원, 관급자재비 756천원으로 교통안전표지 유지보수공사에 설계반영

설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감		비 고
총 공 사 비	62,000,000	67,444,000	5,444,000	증
공 급 가 액	56,363,636	61,312,727	4,949,091	증
부가가치세	5,636,364	6,131,273	494,909	증

세부공사계획

공사명 : 2015년 교통사고 잦은 곳 개선 안전표지공사

- 공사장소: 종로구 종묘앞

- 서울지방경찰청 교통안전시설물 개선요청(작업수량12매 신설)

공사명 : 2015년 소방관서 긴급출동 신호시스템

- 공사장소: 공릉119안전센타, 방학119안전센타

- 서울지방경찰청 교통안전시설물 개선요청(작업수량4매 신설)

보고자 검토의견

예산배정이 소액으로 ‘15년 교통안전표지 유지보수공사 연간단가 계약 건에 합산하여 사업을 최대한 추진하고 설계변경 정산코자 합니다.

붙임 : 관련 공문(교통운영과) 2부. 끝.