문서번호	공간정보담당관-12938
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
최지혜		김태준	11/30 조봉연
협조

2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업 주간업무(11월4주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-4594				142,560천원

2015. 11.

정 보 기 획 관

(공간정보담당관)

2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업

주간업무(11월4주) 보고

사업명			2015년 항공사진 서비스 기능개선 사업
사업기간			`15.08.04. ~ `16.01.31.	서울시담당		공간정보담당관 최지혜
사업비			142,560천원	업체/PM		㈜씨엠월드 컨소시엄 박철희 차장
보고기간			‘15.11.23.~‘15.11.27.	전체공정율		계획 59.3% / 실시 57.7%
주요내용			1. 중간보고회 수행 2. 항공사진 시민서비스 관리자 중복 기능 페이지 분석 및 정리 3. 항공사진 국군기무사 보안처리 작업
주간 업무 보고
Part	금 주 실 적 (2015.11.23 ~ 2015.11.27)				차 주 계 획 (2015.11.30 ~ 2015.12.04)
사업관리	1. 중간보고회 수행 일 시 : 2015년 11월 23일(월요일) 15:00~16:00 장 소 : 스마트 정보지원센터(서소문청사 1동 3층) 참석자 : 공간정보담당(과장, 팀장, 주무관 등 12명) 유관부서(건축기획과 1명) 수행업체(박철희 차장 등 4명)				정사영상지도 국정원 보안 미 처리 영상 서비스 관련 사항 협의
시스템 개발	1. 시스템 구현 - 메타 데이터 표출 (수치지도 인덱스, 행정경계, 지적지번) - Naver 위치검색 기능 개발(계속) - 국가기본구역 API 적용 2. 웹표준 진단 - 관리자 중복 페이지 분석 및 정리 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 Markup Validation : 총 54page 중 2page 누적 : 9page CSS Validation : 총 54page 중 20page 누적 : 50page				1. 시스템 구현 - 메타 데이터 표출 개발(계속) - 항공사진 낱장 표출 개발 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정
DB구축	1. 2015년 항공사진 DB구축 - 국군 기무사 보안처리 (총:921매 중 130매 수행) 누적 : 500 매				1. 2015년 항공사진 DB구축(계속) - 국군 기무사 보안처리 작업
산출물/ 별첨자료	○ 주간보고서 1부.
협조사항
對 서울시
對 용역업체
기타