문서번호	하천관리과-4920
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
박정훈	손경철	이진용		전결 12/01 김학진
협 조	물재생계획과장		신현태
	물순환정책과장		최진석

「시민 불안감 해소 및 재난대응능력 향상을 위한」

침수취약지역 해소 관련 홍보계획

2015. 11.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「시민 불안감 해소 및 재난대응능력 향상을 위한」

침수취약지역 해소 관련 홍보계획

2010, 2011년 침수피해 이후 중점 추진중에 있는 침수취약지역 해소 사업에 대한 추진 현황 및 성과를 적극 홍보하여 풍수해에 대한 시민 불안감을 해소하고 신뢰받는 시정을 구현코자 함.

Ⅰ		사업 추진현황

□ 사업개요

○ 사업목표 : 상습 침수취약지역 해소

○ 사업기간 : 2011 ~ 2019년

○ 침수취약지역 현황

- 총 34개소 : 특별관리(11개소) / 중점관리(16개소) / 기타관리(7개소)

○ 추진실적

- ‘13년 완료(5개소) : 구의·자양, 면목동, 미아삼거리, 장위동, 가산디지털단지역 일대

- ‘14년 완료(4개소) : 영림초교, 장안1동 주민센터, 선릉역, 을지로입구역 일대

- ‘15년 완료(3개소) : 신촌현대백화점, 상도동 성대시장, 풍납1,2동 주민센터 일대

○ 추진계획

2015	2016	2017	2018	2019
3개소	5개소	10개소	6개소	1개소
∘신촌현대백화점 일대(완료) ∘성대시장 일대 (완료) ∘풍납1,2동 주민센터 일대(완료)	∘공릉초교 일대 ∘공항펌프장 일대 ∘신천지역 ∘잠원지역 ∘용답동답십리 일대	∘대치역사거리 ∘광화문 일대 ∘한강로 일대 ∘신월지역(2개소) ∘강서구청사거리 ∘시흥사거리 일대 ∘내방역사거리 일대 ∘암사역 주변 ∘오류동역 주변	∘도림천(3개소) ∘사당역 일대 ∘길동 일대 ∘망원유역 일대	∘강남역 일대

Ⅱ		홍보 계획

□ 추진 방향

○ 침수해소사업 추진성과 홍보로 침수취약지역 거주 시민 불안감 해소

○ 사업 지속추진 의지(목표연도 내 완료) 홍보로 신뢰받는 행정 구현

○ 주요 수방시설물 사업추진 홍보로 시민 관심제고 및 재난대응능력 향상

□ 홍보 기간

○ 1단계 : ´15. 12 ~ ´16. 06. (´16년 우기전 집중홍보 실시)

○ 2단계 : ´16. 07 ~ ´19. 06.

□ 홍보 방법 : 보도자료(필요시 기자설명회 개최)

□ 홍보 일정

홍보 시기	주요 내용	세부 홍보내용	추진부서
´15. 12월	주요 침수취약지역 해소사업 추진 관련	① 강남역 일대 침수해소 단계별 사업추진 ② 사당역 일대 침수해소 방안 마련 ③ 기타, 침수취약지역 사업 추진현황	물재생계획과 하천관리과 하천관리과
´16. 1월	저지대 침수취약지역 해소 추진 관련	① 빗물펌프장 신설 및 증설 사업 ② 유수지 설치 및 활용 방안	하천관리과
´16. 2월	통수능 확보가 어려운 지역 침수해소 추진	① 침수 피크타임을 완화하는 빗물저류조 설치 ② 광범위한 침수취약지역 해소를 위한 빗물저류배수시설 설치	하천관리과
´16. 3월	산발적 소규모 침수지역 해소 추진 관련	① 침수해소와 병행 환경개선을 위한 하수관로 종합정비사업 ② 빗물유입시설 및 하수도수위계 설치	물재생계획과
´16. 4월	장기적 친환경 침수 대책 추진 관련	① 빗물 침투·저류시설 등 우수유출 저감시설 설치 ② 수자원 확보 및 재이용 활성화를 위한 빗물이용시설 설치	물순환정책과
´16. 5월	시민과 함께 대응하는 풍수해 안전대책 추진	① 2016년 풍수해 안전대책 추진	하천관리과

□ 세부 홍보내용

【’15. 12월】: 주요 침수취약지역 해소 추진

① 강남역 일대 침수해소 단계별 사업 추진

- 1단계 “배수구역 경계조정” 공사 시행(’15.12 ~ ’16.5)

- 2단계 “유역분리터널” 공사 시행(’16.7~’19년 우기전)

② 사당역 일대 침수해소 방안 마련

- 빗물저류조 설치 및 관거개선 추진현황

- 빗물저류를 위한 민자 도로터널 연계방안 검토 등 사업계획 수립(’16.2)

③ 기타, 침수취약지역 사업 추진현황

- 망원유역 및 오류동역 일대 사업계획 수립(’15.11)

- 대치역사거리 도곡펌프장 및 길동 일대 하수관 개량공사 착공(’15.11) 등

【’16. 1월】: 저지대 침수취약지역 해소 추진

① 빗물펌프장 신설 및 증설 사업

- 빗물펌프장 기능 및 사업 추진 성과, 향후 추진계획

- 빗물펌프장 설치 반대민원 해소사례(용산 및 도곡 빗물펌프장 : 설치 위치 변경,  잠원펌프장 : 사업계획 변경<자연방류관로>)

② 유수지 설치 및 활용 방안

- 침수방지를 위한 유수지 정비 추진사업 현황

- 유수지 활용계획(생태공원 및 행복주택 조성 등)

【’16. 2월】: 통수능 확보가 어려운 지역 침수해소 추진

① 침수 피크타임을 완화하는 빗물저류조 설치

- 집중호우시 빗물저류조 기능 및 사업 추진현황, 임시저류조 등 응급대책

- 사업 추진에 따른 민원 해결사례(서울대정문앞 저류조 : 서울대측 반대민원 이해설득, 시흥저류조 : 상부 공원조성으로 주민 이해설득)

② 광범위한 침수취약지역 해소를 위한 빗물저류배수시설 설치

- 빗물저류배수시설 기능 및 사업효과, 사업 진행상황

- 전국 최초 신월 빗물저류배수시설 설치 추진과정(민간전문가 TF 구성 등)

【’16. 3월】: 산발적 소규모 침수지역 해소 추진

① 하수관 종합정비사업 추진

- 침수 해소대책과 병행하여 도시환경 개선을 위한 하수관 종합정비사업

- 하수관 통수능 확대, 배수분구 종합정비사업, 노후관개량 및 준설 등

② 빗물유입시설 및 하수도 수위계 설치

- (횡단)빗물받이 설치 및 준설·청소, 침수대응을 위한 하수도 수위계 설치

【’16. 4월】: 장기적 친환경 침수대책 추진

① 빗물 침투·저류시설 등 우수유출저감시설 설치

- 홍수로부터 안전한 도시를 위한 치수계획과 도시환경개선 회복을 위한 물순환 계획을 통합하는 빗물관리 지구단위계획 수립(전국 최초)

- 주민이 참여하는 물순환 빗물마을 조성확대 등 시민참여 거버넌스 강화

② 수자원 확보 및 재이용 활성화를 위한 빗물이용시설 설치

- 건축물의 지붕면 등에 내린 빗물을 모아 이용할 수 있는 빗물이용시설 확대 보급(민간 빗물이용시설 100개소, 공동주택 및 학교 9개소 시설설치 지원)

- 빗물주치의 제도를 활용한 빗물이용시설 활용 홍보

【’16. 5월】: 시민과 함께 대응하는 안전대책 추진

① 2016년 풍수해 안전대책 추진

- 풍수해 대비를 위한 예방사업 확충 및 수방시설물의 점검·정비 추진

- 재난대응능력 향상을 위한 매뉴얼정비, 돌봄공무원 역량강화, 대응훈련 실시

- 풍수해 재난안전대책본부 운영, 수방상황 관리시스템 고도화 등

붙임 : 침수취약지역 사업 추진계획 및 주요 추진일정 1부.  끝.

【참고자료】

□ 침수취약지역 사업 추진계획

○ ’16년 해소되는 지역별 주요 대책내용

지 역	주 요 대 책	비 고
공릉초교 일대	공릉2빗물펌프장 설치(520㎥/분)	4월 완료
공항펌프장 일대	마곡1빗물펌프장 설치(4,080㎥/분)	5월 완료
용답동 답십리역	하수관거 개량 L=0.55km	6월 완료
신천지역	신천펌프장 유입관로 개량 L=2.7km	12월 완료
잠원지역	자연방류관로 설치 L=0.64km	12월 완료

○ 특별관리지역 ’16년 주요 시행계획

구분	주 요 대 책	´16년 시행계획
강남역	- 단기대책(완료) : 저류조 및 유입 관로 설치, 격벽철거(39개소), 고지대 빗물유입시설 확충 - 유역분리터널 설치(D=7.5m, L=1.3㎞) 및 배수구역경계 조정(116㏊)	- 배수구역 경계조정 완료 (`15.12 ~ `16.5월) - 유역분리터널 착공(`16.7월) `19.6월 해소대책 추진완료
사당역	- 단기대책(완료) : 임시저류조 2개소 설치(사당역 4.5만톤, 사당IC 1.5만톤) - 저류조(2개소 1.6만톤), 관거개선 (4.1㎞), 빗물저류배수시설 설치 (D=6.0m, L=3.7㎞)	- 실시설계 완료(`15.12월) - 저류조 착공(`16.6월) 관거 개선 착공(`16.9월) - `18년 해소대책 추진완료
신 월	- 빗물저류배수시설(터널 3.61km), 유도터널 2개소, 수직구 6개소	- 터널공사 지속 추진 (착공 `15.1월) - `17년 해소대책 추진완료
광화문	단기대책(완료) : 하수관거(0.87km)개량, 세종로 주차장 저류조(1.5만톤) - 세종로 주차장 유입시설(L=0.22km), 관로개선(L=0.85km)	- 실시설계 완료(`15.10월) - 하수관로 착공(`15.11월) - `17년 해소대책 추진완료
한강로	- 빗물유입시설 확충(횡단 빗물받이 및 연속형), 만초천 교량 재설치 - 빗물펌프장 1개소(1,010톤/분) 유역분리관거(신설 1.03km, 개량 1.3km)	- 기 공사착수 (`13.12) 후 본격 공사 추진 - `17년 해소대책 추진완료

□ 침수취약지역 사업추진 주요일정

추진 일정	사업추진 주요내용
´15.11월	- 풍납동 주민센터 주변 사업완료 - 대치역 사거리 도곡펌프장 착공 - 길동 일대 하수관 개량공사 착공 - 망원유역 및 오류동역 사업계획 수립
´15.12월	- 강남역 일대 배수구역 경계조정 착공
´16. 2월	- 동작·사당역 사업계획 수립
´16. 3월	- 망원유역 하수관거 개량공사 착공
´16. 4월	- 공릉초교 주변 침수취약지역 해소사업 완료
´16. 5월	- 강남역 배수구역 경계조정 완료 - 공항펌프장 일대 해소사업 완료 - 오류천 및 시흥천 단면확장 착공
´16. 6월	- 동작 사당역 일대 해소사업 착공 - 용답동 답십리역 일대 해소사업 완료
´16. 7월	- 강남역 유역분리터널 착공
´16.10월	강서구청 사거리 가양빗물펌프장 주변 하수관개량 완료
´16.12월	잠원지역 해소사업 완료 신촌지역 해소사업 완료