문서번호	정보공개정책과-22941
결재일자	2015.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기록문화팀장	정보공개정책과장
김보인		문인환	전결 12/01 조영삼
협조

서울기록화 사료관리시스템 구축 · 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업 주 간 업 무 보 고

행정국

(정보공개정책과)

서울기록화 사료관리시스템 구축 · 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업

주  간  업  무  보  고(13주차)

사업개요

1. 서울기록화 사료관리시스템 구축 사업

○ 사업기간 : 2015.8.28.~12.31

○ 사 업 비 : 92,600천원

○ 수행기관 : 한국문헌정보기술(주) (PM:문병준)

2. 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업

○ 사업기간 : 2015.8.28.~12.31

○ 사 업 비 : 159,000천원

○ 수행기관 : ㈜알엠소프트 (PM:윤정훈)

추진기간 : 2015.11.23.~2015.11.29

추진실적

1. 서울기록화 사료관리시스템 구축 사업

<구현>

○ 11.24 공간정보 연계 규격 협의를 위한 실무회의

- 공간정보담당관에서 제공하는 url 방식 api를 적용하여 연계하기로 함

- 연계 메타 정의를 위한 사진 등록 메타 정보 제공

○ 11.27 정보소통광장 연계 실무 회의

- 연계 view 생성 규격 협의

- 5개 view를 생성하고 일 배치 형식으로 데이터 동기화 하기로 함

- 연계view : 사진정보(공개대상), 카테고리, 주요인물, 컬렉션 메인, 컬렉션 사진

- 연계 테스트 : 12월 9일(예정)

○ 사진관리시스템 개발(계속/12월 2째주 완료목표)

대메뉴	중메뉴	소메뉴	완료여부
등록	사진등록		진행중
공개관리	공개신청		완료
	신청관리	공개신청 승인관리	완료
		해제신청 승인관리	완료
	신청현황		완료
검색	일반검색		완료
	카테고리별 검색		완료
열람	열람승인		완료
	권한부여		완료
	나의열람기록물		완료
	열람신청이력현황		완료
통계	등록현황통계		진행중
	공개현황통계		진행중
	열람현황통계		진행중
	카테고리통계		진행중
서비스관리	메인사진 관리		완료
	추천사진 관리		완료
시스템	사용자관리		완료
	부서관리		완료
	메뉴관리		완료
	공통코드관리		완료
	메타데이터관리		완료
	카테고리관리		완료
	이력관리		완료
	컬렉션관리		완료

- 열람 개발 완료 / 등록, 검색 보완 및 단위테스트 진행중

○ 아카이브 서비스 개발(계속 / 11월 말 완료 목표)

- 네이버맵 클러스트링 작업

- 그래프 연도 검색 적용

- 컬렉션 디자인 작업

- 서비스 기능 퍼블리싱 및 구현

2. 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업

<업무보고>

○ 시정사진기록 DB 정리

- 주간실적(5일): 공정률 9.6%

Task 실적	분류/기술			검수
	색인등록	내용기술	분류	1차	2차
실적건수	10,160	10,160	30,000	30,000	0
실적률	10.1%	20.1%	20%	20%	0%

- 누적실적(27일): 공정률 87.6%

Task 실적	분류/기술			검수
	색인등록	내용기술	분류	1차	2차
실적건수	110,214 (10,214 초과)	110,214 (60,214 초과)	70,000	70,000	0
실적률	110.2% (10.2% 초과)	220.2% (120.2% 초과)	70.0%	70.0%	0%

○ 시정 콘텐츠 발굴

- 콘텐츠 발굴

· 테마별 시정사진 선별

· 테마별 소개문구 작성(50개, 붙임 초안 목록 참고)

- 콘텐츠 에피소드 제작

· 제목(가제) : 서울살이, 나는 [서울시민]이다

· 기획안 수정 및 콘티 작성

· 일러스트 작업

향후계획

1. 서울기록화 사료관리시스템 구축 사업

<사업관리>

○ 12.1 3시 데이터센터 시스템 관련 서버, DB 입주관련 회의

○ 12.4 2시 시스템 1차 시연 회의

※ 붙 임

1. 서울기록화 사료관리시스템 구축 사업 주간업무 보고서(13주차) 1부.

2. 시정 사진기록 정리 및 콘텐츠 발굴 사업 주간업무 보고서(13주차) 1부.

3. 콘텐츠 테마별 소개문(안) 1부.