투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2015년 하반기 운동 및 편의시설 정비공사 (첨부수정)

1. 녹지관리과-4780(2015.11.20.)호 관련입니다.

2. 「2015년 하반기 운동 및 편의시설 정비공사」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

계 약 현 황	공 사 명	2015년 하반기 운동 및 편의시설 정비공사
	계약상대자	주식회사 수암조경 (대표 : 지창규)
	계 약 일 자	2015.10.22
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경 (증 3,994,790) 및 계약기간 변경
	변경사유	물량증감사항 반영 및 우천으로 인한 공기 연장
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.10.26	변경후 착공일자	2015.10.26
	변경전 준공기한	2015.11.20	변경후 준공기한	2015.11.30
금 액 변 경	변 경 전	************
	변경금액	증 3,994,790 원
	변 경 후	36,854,090**

붙    임 :  1. 계약보증서 1부

2. 도시철도채권매입필증 1부

3. 설계변경내역서 1부

4. 변경계약의뢰서 1부. 끝.

주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	12/01 이상국
협조자
시행	총무과-20237	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개