투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경(1차 내역변경) 계약의뢰(서울 재사용플라자 건립 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 「서울재사용플라자 건립 전기공사』 와 관련, 아래와 같이 설계변경 계약의뢰(1차 내역 변경)하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 서울 재사용플라자 건립 전기공사

2. 공사금액 : 금2,203,378,690원(1차 400,000천원)

3. 시 공 사 : ㈜다부전설외 1개사

4. 공사기간 : ‘15.06.15 ~ ’17.01.17.(1차 : ~‘16.03.31) 변경없음

5. 공사금액 변경 현황

(단위:원)

구 분	계약금액	변경금액	증‧감	비고
총 차	2,203,378,690	2,203,378,690	0
1 차	400,000,000	426,041,390	26,041,390
향 후	1,803,378,690	1,777,337,300	-26,041,390

6. 변경사유 : 금년도 예산이 명시이월 예산으로 예산 불용방지
및 예산의 효율적 운영을 위해 1차 내역 변경.

따로붙임 : 1. 설계변경 시행 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	이달영		설비부장	12/01 박기형
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-15251	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개