서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울영어마을 관악캠프 원장
(경유)
제목	'15년 하반기 기능보강 사업내역 일부변경 승인 통보

1. 관악영어마을 2015-86(2015.11.7.)호와 관련입니다.

2.‘15년 하반기 관악캠프 기능보강 사업내역 일부 변경요청건에 대하여 아래와 같이 변경승인 통보하니, 공사시행에 철저를 기하시기 바라며 사업변경에 따른 사업비의 감액분에 대하여는 공사완료후 반납조치 하시기 바랍니다.

가. 변경승인내역

(단위:천원)

사업명	사 업 비			내역 및 사유
	당 초	변 경	증 감
안전난간대 보강	12,500	6,540	△5,960	-시공내역 일부조정 (유리설치 및 높이조정 취소) -취소내역 공사비 감액
추락방지시설 설치	3,900	5,980	2,080	-당초 : 1층계단 측면설치 -변경 : 1. 2층계단 측면설치

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	권돈혁		평생교육사업팀장	류연호		평생교육담당관	12/01 조미숙
협조자
시행	평생교육담당관-12619	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	(02)2133-3970	/전송	(02)2133-1013	/	kdh1785@seoul.go.kr	/	대시민공개