투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	단가계약 물품 변경구매-자전거도로 업그레이드공사(도막형바닥재)

1. 시설관리과-3527(2015.11.26.)호 관련입니다.

2. 시설관리과에서 시행 중인“한강공원 자전거도로 업그레이드공사”에 소요되는 관급자재(도막형바닥재)에 대해 다음과 같이 변경구매하고자 합니다

가. 공 사 명 : 한강공원 자전거도로 업그레이드공사

나. 관급자재 납품기한 연기 현황

문서번호	품 명	수량	납품요구번호	납품기한 연기		비고
				당초	변경
시설관리과-3192 2015.10.22	도장형바닥재	1,000㎡	12-15-1-23801-00	2015.11.30.	2015.12.15.	화성이엔씨㈜
	도장형바닥재	1,000㎡	12-15-1-23803-00	2015.11.30.	2015.12.15.	㈜에코피아

다. 연기사유 : 자전거도로 포장양생(45일소요)에 따른 납품기한 연기.

붙임 변경요청서 1부.  끝.

주무관	이규옥		총무과장	12/01 최대봉
협조자
시행	총무과-20164	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0713	/전송	02-3780-0740	/	santamam@seoul.go.kr	/	대시민공개