문서번호	도로보수과-5351
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
홍수종	12/01 국중진

작업완료 보고서(제9차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

성동도로사업소

(도로보수과)

·

작업완료보고

□ 공사 일반현황

○ 공  사  명 : 2015년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가계약)

○ 공 사 개 요 : 소규모 포장복구 : 171a, 절삭후덧씌우기 : 335a

○ 공사기간 : 2015. 3. 10 ~ 2015. 12. 31

○ 착  공  일 : 2015. 3. 10

○ 준공예정일 : 2015. 12. 31

○ 도  급  자 : 정만건설(주)  박창엽

○ 도 급 비 : 1,798,610,000원

□ 보고내용

【9차】

○ 9차 작업지시

- 작업지시일 : 2015. 10 16

- 작업지시내용 : 광진구 자양동 224-17 앞외 5개소

(굴착복구A-1 : 15.66a, 차로단위복구 : 28.4a)

○ 작업완료구간 내용(9차)

- 작업완료일 : 2015. 11. 30

- 작업완료내용 : 광진구 자양동 224-17 앞외 5개소

(굴착복구A-1 : 8.66a, 차로단위복구 : 20.47a)

○ 작업현황

지시 번호	위 치	포장 종류	지시내용			완료내용			비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
9-1	자양동 224-17 앞	A-1	1.2	1.2	1.44	1.2	1.2	1.4
9-2	상봉동 107-28 ~ 면목동 91-69	A-1	2.0	700.0	1,400.0	1.2~7.2	363.0	684.04
		평삭(A-1)	3.5	700.0	2,450.0	3.0~7.4	331.0	1,613.22
9-3	송정동 100-32 앞	A-1	1.2	3.0	3.6	1.2	3.0	3.6
9-4	중곡동 649-8 앞	A-1	1.2	2.0	2.4	1.2	4.7	5.64
9-5	용마산로 119 앞	A-1	1.2	3.0	3.6	8-2에 포함
9-6	청량리동 205-707 ~ 205-758	A-1	1.2	130.0	156.0	1.2~3.9	254.0	171.84
		평삭(A-1)	3.0	130.0	390.0	3.5	124.0	434.0
계					1,566.71 (2,840)			866.52 (2,047.22)

□ 조치사항

○ 위 내용과 같이 복구 완료된 구간에 대하여 추후 설계변경에 반영하여               준공처리 하고자 합니다.

붙임 : 작업완료보고서 1부. 끝.