서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 종합사회복지관 기능보강사업 변경 검토(노원구-노원1)

1. 노원구 복지정책과-22259(2015.9.15.), 노원구 복지정책과-28368(2015.11.17.),  서울시복지재단 지역복지본부-8066(2015.10.5.) 관련입니다.

2. 2015년도 기능보강사업 추진과 관련하여 사업계획 변경 요청에 대하여 미흡한 부분(석면철거공사 사전 완료 미보고, 예산 세부내역 상이 등)에 대한 경위서를 제출받아 검토 후 다음과 같이 처리하고자 합니다.

※ 경위서 검토 결과 석면철거공사 미보고 및 예산 과다신청, 소요예산 세부내역 상이

3. 또한, 서울특별시 지방보조금 관리조례 제25조, 제33조의 규정에 의거 신고의무 미이행으로 보조금 교부결정 취소 및 사회복지사업법 제40조 1항 4호의 행정처분 대상이나, 안전관련 사업임을 감안하여 타 사업으로 변경하여 사용 승인하고 자치구 및 시설에 주의 조치 하고자 합니다.

가. 대    상 : 노원구 노원1종합사회복지관

나. 변경사업 : 지하1층 안전보강 및 개보수 공사

다. 변경내역

(단위 : 천원)

변경전					변경후
사업내용	총사업비	시비	구비	자부담	사업내용	총사업비	시비	구비	자부담
계	44,286	31,000	13,286	-	계	46,389 (2,103)	31,000	13,286	2,103 (2,103)
지하층 조리실	30,397	21,278	9,119	-	지하층 조리실	30,397	21,278	9,119	-
석면철거공사	2,980	2,086	894	-	지하층 난방밸브 교체	4,178 (1,198)	2,086	894	1,198 (1,198)
설계 및 기타	10,909	7,636	3,273	-	설계 및 기타	11,814 (905)	7,636	3,273	905 (905)
◎ 변경사유 - ’14년 기능보강 신청 당시 지하층 복도 벽면이 석면자재였으나 ’14년 8월 SH공사에서 석면 철거 및 복구하여, - 석면공사 철거 비용 사용하여 지하층 지역난방 DPCV 바이패스밸브, DPCV 전후 차단밸브를 누수현상이 심화된 곳에 교체하고자 함 ※ 시·구비 변동 없으며 증액분 2,103천원은 자부담

라. 검토결과 : “승인”  * 경위서 검토 및 서울시복지재단 타당성검토 완료

- 현장 확인 결과 누수가 되고 있어 밸브교체가 필요한 상태로 변경 타당함

붙   임 : 1. 검토결과(노원구-노원1)

2. 변경신청서.

3. 노원구청 경위서.

4. 견적서 등 증빙자료.  끝.

주무관	이광훈		시설지원팀장	오은미		복지정책과장	12/01 엄의식
협조자
시행	복지정책과-12960	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-7355	/전송		/	kwang92@seoul.go.kr	/	대시민공개