문서번호	토목부-25397
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		代강철규	12/01 노우성
협조

교통안전시설물 설치비 반영 검토보고

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

교통안전시설물 설치비 반영 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

서빙고고가교 본선부, 강변북로 접속부, 하부도로(서빙고로)에 설치한 교통안전시설물 설치비 반영에 대한 검토보고임

1		관련근거

❍ 한종(서빙고) 제15-227호(2015.11.24.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

❍ 규    모

- 기존고가 철가 : B=16m, L=510m

- 고가설치 : B=6.4, L=115m / B=10.4, L=290m

❍ 공사기간 : 총괄 2011. 1. 6. ∼ 2015.12.31.(5차 2015. 3. 2. ~ 2015.12.31.)

❍ 도 급 비 : 총괄 20,221백만원(5차 7,893백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1    ❍ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외 1

3		감리단 보고내용

❍ 설치사유

- 서빙고고가교 존치부(경원선 횡단구간) 미공용 구간 차량진입등 주행차량의         안전을 위하여 교통안전시설물(방호벽, 시선유도봉) 설치

- 강변북로에서 한남동방향 임시 가설교량(#1,2) 철거시 한남동방향 진입         통제에 따른 강변북로 및 한강교량상에 사전 교통안내 간판 설치

- 서빙고고가교 본선부 임시개통시 강변북로 접속부 임시 진입도로 확보에         따른 주행차량의 안전을 위하여 교통안전시설물 설치

- 서빙고고가교 하부도로(서빙고로) 안전지대 원상복구(A1~P2) 및 불법         주·정차등에 따른 민원 발생구간(P3~P6) 시선유도봉 설치

❍ 검토내용

1) 경원선 통과구간

- 현 황

· 한남동→강변북로 : 신설(1차로)→경원선통과구간(2차로)→신설(1차로)

· 강변북로→한남동 :  존치구간(1차로)→경원선 통과구간(2차로)→신설(1차로)

- 설치도면

- 설치수량

구 분	규 격	단위	수량	비고
PC방호벽	600×900×2000	m	42(총 96m-재활용54m)
시선유도봉	750×200×80	개	116(232m×2m간격)

2) 한남동 방향 강변북로 접속부

- 현 황

· 임시개통전 가설교량(#1,2)철거에 따른 한남동 방향 진입 교통통제에             따른 홍보용 안내간판 및 진입부 교통안전시설물 설치

- 설치도면(강변북로 접속부)

- 설치수량

[사전 홍보용 안내간판]

구 분	합계	900×1800	배너	현수막	비고
원효대교~한강철교	14	12	2
한강철교~ 동작대교	26	9	16	1
동작대교~반포대교하부	14	11	2	1
반포대교~반포대교 북단램프	26	14	6	6
합계	80	46	26	8

[접속부 교통안전시설물]

구 분		규 격	단위	수량	비고
강변북로→한남동 진입부	PE방호벽	1.2m	m	144
	델리네이트	쏠라형	개	40

3) 일산방향 강변북로 접속부

- 현 황

· 본선 완전개통 차로 위치에 임시가설교량(#3,4)이 위치하고 있어 임시             개통시 강변북로 접속을 위해 임시 진입도로(곡선)를 설치함

- 설치 수량

구 분	규 격	단 위	수 량	비고
공사안내간판	900×1800	개	3
교통안내간판	900×1800	개	4
삼각+원+보조표지	천천히	개	2
LED 안내표지	400×1000	개	2
점멸등	쏠라	개	2
갈매기 표지	쏠라	개	11
PE 방호벽	1.2m	m	145
델리네이트	쏠라	개	60
PE 충격 흡수탱크	900×900	개	1
시선유도봉	750×200×80	개	10
차선합류주의	0.5×1.2	개	2
차선축소주의	0.5×1.2	개	6

4) 고가교 하부도로(서빙고로)

- 현 황

· 고가교 하부 A1~P2구간은 공사전 시선유도봉이 설치되어 있던 구간임

· 한남역에서 고가 진입구간과 하부도로 직진구간이 분리되는 곳은 차량             운전자의 각별한 주의가 필요한 구간임

· 고가교 하부 P3~P6구간은 불법 주·정차로 민원이 제기됨

- 설치수량

구 분	시선유도봉	단 위	수 량	비고
A1~P2	900×1800	개	113
P3~P6	900×1800	개	148
고가교 진입부	천천히	개	24

❍ 적용단가 검토 및 공사비 증·감 현황

- 적용단가 검토

· 기존공종 : 기존단가 적용

· 신규공종 : 낙찰율(81.57%) 적용

- 공사비 증·감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			공사비(천원)			비고
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
5. 부 대 공
5.1 안전시설물
a. 안전시설물						0
a-1 공사안내표지판		개	0	3	3	0	98
a-2 교통안내표지판	0.9×1.8	개	0	50	50	0	2,384
a-3 삼각+원+보조표지판		개	0	2	2	0	266
a-4 갈매기표지판	쏠라	개	0	11	11	0	2,995

공 종	규 격	단위	수 량			공사비(천원)			비고
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
a-5 델리네이터	쏠라	개	0	100	100	0	2,713
a-6 배너형 안내표지		개	0	26	26	0	1,225
a-7 LED 안내표지판	400×1400	개	0	2	2	0	3,597
a-8 점멸등	쏠라	개	0	2	2	0	514
a-9 PE 충격흡수탱크	900×900	개	0	1	1	0	857
a-10 탄력봉 설치	750×200×80	m	0	411	411	0	11,616
a-11 PE방호벽	6개월,1.2m/EA	m	0	145	145	0	4,098
a-12 PE방호벽	1개월,1.2m/EA	m	0	144	144	0	2,494
a-13 현수막		개	0	6	6	0	321
a-14 교통안내표지판	0.5×1.2	개	0	8	8	0	323
b. 콘크리트 분리대			0
b-1 PC방호벽	0.6×0.9×1.2	m	0	42	42	0	5,553
직접공사비							39,054
제경비							6,046
공급가액							45,100
부가가치세							4,510
도급금액							49,610

4		검토의견 및 조치계획

❍ 교통안전시설물 설치에 대한 감리단의 검토내용이 적정하므로 승인하고

❍ 향후 설계변경시 반영하고자 함

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.