문서번호	정보시스템담당관-13405
결재일자	2015.12.2.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원관리팀장	정보시스템담당관
김선애		현창기	12/02 서병철
협조

- 2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 사업 -

주 간 업 무 보 고

(2015.11.9.~2015.11.13, 37주차)

2015. 11.

정보시스템담당관

[정보자원관리팀]

『 2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 사업 』

주 간 업 무  보 고

(2015.11. 9. ~ 2015.11. 13.)

『2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수』용역 사업의  주간업무(37주차) 보고 드림 (계약번호 : 20150318153호).

Ⅰ		사업개요

사업기간 : 2015. 3. 1. ~ 2015. 12. 31.

*********************

*******************

과업개요

❍ 기 운영하고 있는 공통행정시스템(31종)에 대한 유지보수

❍ 공통행정시스템 기능개선 및 보완개발

❍ 공통행정시스템 보급·공동활용 지원 및 운영체계 개선

❍ 기반 소프트웨어(미들웨어, 검색엔진 등) 및 개발 플랫폼 유지보수

Ⅱ		주간업무 보고

추진실적(37주차)

❍ 추진기간 : 2015. 11. 9. ~ 2015. 11. 13.

❍ 투입현황 : 총 57M/M중 49.82M/M(이전 : 48.22M/M)

❍ 유지보수 처리실적

구분	과업 요청(건수)		과업 완료(건수)		전체 처리 비율(%)	처리 비율(%)
	총누계	요청	총누계	처리
********	1,189	32	1,189	32	100	100
*******	4	0	4	0	100	100
*******	176	6	176	6	100	100
***********	76	1	76	1	100	100
*	1,445	39	1,445	39	100	100

사업 진척도

❍ 추진기간 : 2015. 11. 9. ~ 2015. 11. 13.

연번	구분			추진기간	단계	진척율		차주 계획	비고
						계획	실적
1	통합 유지보수			‘15.03.01.~12.31.	유지관리	84%	84%	86%
2	서비스수준협약 체결			‘15.04.01.~04.30.	완료	100%	100%	-
3	기능개선	일정관리시스템		‘15.04.01.~06.30.	완료	100%	100%	-
				‘15.08.01.~10.31.	개발	100%	100%	-	추가/확대
4		품질시험관리시스템		‘15.05.18.~06.30.	완료	100%	100%	-	전체일정 4.1.~11.30.
5		시민표창관리시스템		‘15.06.15.~10.31.	개발	100%	100%	-
6		방문민원 온라인화(3종)		‘15.06.15.~11.06.	개발	100%	100%	-
			문화재 촬영허가	‘15.06.15.~10.31.	완료	100%	100%	-
			수도요금납부증명	‘15.06.15.~11.06.	개발	100%	100%	-
			소방시설공사 민원	‘15.06.15.~11.06.	개발	100%	100%	-
7		자율위생점검관리시스템		‘15.07.21.~08.14.	완료	100%	100%	-
8		전자설문및퀴즈관리시스템		‘15.08.01.~09.30.	완료	100%	100%	-
9		환경영향평가관리시스템		‘15.09.01.~11.15.	개발	80%	80%	90%
10		하이보드(게시판공통모튤)		‘15.09.15.~11.30.	분석	70%	70%	80%
11	시스템 정기점검			‘15.03.01.~12.31.	유지관리	84%	84%	86%
12	기타	인터넷민원신청및증명발급시스템(GPKI모듈 : 멀티브라우저 적용)		‘15.04.13.~04.24.	완료	100%	100%	-
13		온라인민원 개선과제 (반응형 웹)		‘15.07.13.~08.31.	완료	100%	100%	-
14		재무회계시스템 리포팅서버 이전		‘15.08.10.~10.09.	개발	100%	100%	-
15		우편번호 변경에 따른 주소DB 생성		‘15.08.10.~08.31.	완료	100%	100%	-
16		포털사이트 민원검색에 따른 온라인민원 기능개선		‘15.09.14.~09.25.	완료	100%	100%	-
17		학술용역 및 기술심의용역관리시스템(정책연구자료 통합 플랫폼 구축 연계)		‘15.10.01.~10.31.	개발	100%	100%	-

※ [붙임] 상세 추진실적 및 금주 계획 참조

붙 임 : 1. 상세 추진실적 및 금주 계획 1부.

2. 주간업무 현황보고서 1부.

3. 유지보수 대장 1부.

4. 유지보수 산출물 1부.  끝.