투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	조달구매 품목변경 요청[2015년 남산공원 남측순환로 정비공사]

1. 시설과-7908(15.11.02)호와 관련입니다.

2.『2015년 남산공원 남측순환로 정비공사』와 관련하여 다음과 같이 관급자재의 물품변경계약을 요청합니다.

가. 건  명 : 스틸그레이팅 조달구매(요구번호 12-15-1-55367-00)

나. 계약자 : ㈜태흥그레이팅  대 표 : 김욱중

다. 납품기한 : 2015.11.13. ~ 2015.12.13

나. 품  명 :

구분	식별번호	규 격	단위	수량	단 가	계	비고
당초	21228199	995*600*75*7*4㎜,뚜껑	개	1,452	78,390	113,822,280	T75㎜
	21228213	995*700*75*7*4㎜,뚜껑	개	121	90,180	10,911,780
	21228227	995*800*75*7*4㎜,뚜껑	개	15	103,500	1,552,500
	21228228	995*800*75㎜,받침	개	15	23,400	351,000
	조달수수료	0.54%	1	식		649,650
	합 계					127,287,210
변경	21228193	995*600*50*7*4㎜,뚜껑	개	1,452	56,400	81,892,800	T50㎜
	21228207	995*700*50*7*4㎜,뚜껑	개	121	65,400	7,913,400
	21228221	995*800*50*7*4㎜,뚜껑	개	15	78,300	1,174,500
	21228220	995*800*75㎜,받침	개	15	17,200	258,000
	조달수수료	0.54%	1	식		492,680
	합 계					91,731,380

다. 변경사유 : 스틸그레이팅 하중검토에 의한 적정규격(T75m→T50m)산출

라. 예산과목 : (감)35,555,830원

- 남산및산하공원운영,남산및산하공원보수정비사업,남산및산하공원시설물보수정비,

시설비(*******01). 끝.

지출품의:No226(2015.12.02)

	시설과장
주무관	김영수		시설팀장	한종수		시설과장	12/02 김한준
협조자
시행	시설과-8952	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5962	/전송	02-3783-5969	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	대시민공개