문서번호	설비부-15369
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		유병기	12/02 박기형
협 조

- 서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기, 소방감리용역 -

용역기간(1차분) 연기검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기, 소방 감리용역」

용역기간(1차분) 연기 검토 보고

선행 공정인 건축공사 지연으로 전기공사의 공사기간 연기에 따른 본 전기공사의 감리(전기, 소방) 용역기간(1차분)을 다음과 같이 연기 조치하고자 검토 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기, 소방 감리용역

용역기간 : 전체 2015.11.01. ∼ 2016.03.31.

1 차 2015.11.01. ∼ 2015.12.30.

계약금액 : 전체 금18,900,000원

1 차 금6,200,000원

계 약 자 : ㈜성우이엠이 대표 조정환

Ⅱ		용역기간(1차분) 연기 검토 내용

용역기간 연기사유

○ 본 전기공사의 선행 공정인 건축공사 지연으로 연장된 전기공사 기간에 맞추어 감리(전기, 소방) 용역기간(1차분) 연기조치가 필요함.

용역기간 연기내용

구분	당 초	변 경	비 고
전 체	2015.11.01.∼2016.03.31.	2015.11.01.∼2016.03.31.	계약금액 변경없음
1 차	2015.11.01.∼2015.12.30.	2015.11.01.∼2016.02.29.	(증61일) 계약금액 변경없음

귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금부과여부 : 미부과

Ⅲ		보고자 조치의견

본 감리용역의 당초 1차분 완수기한을 2016.02.29일까지 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 합의각서 1부. 끝.