문서번호	토목부-25648
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
심규진		서관석	12/02 노우성
협조	주무관		오열상
	주무관		장기철

폐기물처리용역 설계변경(5차2회) 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 건설폐기물처리용역 》

2015.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

폐기물처리용역 설계변경(5차2회) 검토보고

(월드컵대교 건설공사 건설폐기물처리용역)

『월드컵대교 건설공사』시행에 따른 건설폐기물처리용역(5차) 물량 정산으로 인한 설계변경 검토보고임.

※ 관련근거 : ㈜포스코엔지니어링 인프라토목-15-03274호(2015.11.23.)

용역개요

❍ 용역규모 : 총괄 폐콘코리트 12,900ton, 폐아스콘 6,150ton

(5차 폐콘크리트 709ton, 폐아스콘 1,942ton)

❍ 용역기간 : 총괄 2011. 9.22. ~ 2020. 8.31.

(5차 2015. 2.12. ~ 2015.12.31.)

❍ 용 역 비 : 총괄 350,829,000원 (5차 50,000,000원)

❍ 용 역 사 : 문화경기㈜ 외 1개사

설계변경 내용 (총괄 변경없음)

❍ 설계변경 사유 : 북단IC 공사중 발생한 건설폐기물을 실물량으로 정산하여 설계변경 시 반영코자 함.

❍ 폐기물 물량 변경 현황                                        (단위:톤)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
5차2회	폐콘크리트	709	699	감) 10
	폐아스콘	1,942	966	감)976

❍ 용역비 변경 현황 (용역기간 변경없음)                             (단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
5차2회	용역비	50,000	31,000	감)19,000

조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 변경된 폐기물 물량을 금회 설계변경 시 반영하여 폐기물처리업무 수행에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(5차2회) 1부.  끝.