문서번호	설비부-15321
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		유병기	12/02 박기형
협 조

- 서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기 및 통신공사 -

공사기간(1차분) 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시기반시설본부

설 비 부

「서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기 및 통신공사」

공사기간(1차분) 연기 검토 보고

본 전기 및 통신공사의 2015년도 사업예산이 명시이월 조치됨에 따라 당초 1차분 공사 준공기한(2015.12.30일)까지로 계약금액 집행이 불가하기에 공사기간을 다음과 같이 연기 조치하고자 검토 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

구분	전기	통신	비 고
공사명	서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기공사	서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 통신공사
공사위치	은평구 통일로 684(서울혁신파크 8동)
공사규모	서울혁시파크 8동(1,2,4층) 리모델링(전기, 소방공사)	서울혁시파크 8동(1,2,4층) 리모델링(통신공사)
공사기간	전체 : 2015.11.01∼2016.03.31 1 차 : 2015.11.01∼2015.12.30	전체 : 2015.11.01∼2016.03.31 1 차 : 2015.11.01∼2015.12.30
계약금액	전체 : 금328,127,880원 1 차 : 금22,000,000원	전체 : 금88,541,030원 1 차 : 금9,000,000원	1차 (15년 예산)
시 공 자	금송전기(주) 대표 신중현	삼정정보통신 대표 이순봉

Ⅱ		공사기간(1차분) 연기 검토 내용

관련근거

○ 준공기한 연기 검토의견서 제출 : SW-감-15-194호(2015.12.01.)

공사기간 연기사유

○ 본 전기 및 통신공사의 2015년도 사업예산이 명시이월 조치됨에 따라 1차분 공사 준공기한이 2015.12.30일까지로 계약금액 집행이 불가하기에 전체 공사기간은 변경없이 1차분 공사기간 연기조치가 필요 실정임.

※ 2015부터 회계연도 패쇄기한이 2015.12.31.일로 변경됨.

공사기간 연기내용

구분	당 초	변 경	증 감	비 고
전체	2015.11.01∼2016.03.31	2015.11.01∼2016.03.31	변경없음	계약금액 변경없음
1차	2015.11.01.∼2015.12.30	2015.11.01.∼2015.02.29	증)61일	계약금액 변경없음

귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금부과여부 : 미부과

Ⅲ		보고자 조치의견

본 전기 및 통신공사의 당초 1차분 공사 준공기한을 2016.02.29일까지 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 기술검토의견서(책임감리원) 1부. 끝.