문서번호	시설관리과-20329
결재일자	2015.12.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
정재필		김만재	12/03 이계환
협조

공사기간 연기보고(수유동 1-144)

명에 의하여 강북구 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2015. 12. 03.

보 고 자 : 지방시설서기보  정 재 필

공사현황

❍ 공 사 명 : 2015년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속공사)

❍ 현    황

****	****	****	***
*****	*********	*********************

❍ 요    지 : 공사기간 연기요청

보고내용

❍ 상기와 같이 상수도관 개량공사를 작업지시 하였으나, 차량출입 및 신축현장 자재반입으로 주민들의 불편을 초래하여 신축공사와 병행하여 실시함이 타당하다 판단돼 공사기간 연기를 요청한 사항임.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 당초 공사기간을 아래와 같이 연기코자 합니다.

❍ 공사기한

지시번호	공사위치	당초기간	변경기간	비고
*****	*********	*********************	*********************

❍ 귀책사유 : 북부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

끝.