문서번호	주거환경개선과-12387
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		성곽마을추진팀장	주거환경개선과장
이정식		곽석권	12/03 박경서
협조

「혜화명륜동 일대 지구단위계획 수립용역」 준공기한 연기 검토보고

2015. 12.

도 시 재 생 본 부

(주거환경개선과)

「혜화명륜동 일대 지구단위계획 수립용역」 준공기한 연기 검토보고

’15.5.7 설계변경되어 혜화, 명륜동 성곽마을 재생계획 내용이 포함되는 ｢혜화명륜동 일대 지구단위계획 수립용역｣ 관련 주민중심 계획의 특징상 계획기간 절대부족(통상1년), 4계절 경관기록 필요, 중동호흡기 증후군 (메르스) 등 여건 변화에 따른 원활한 계획수립을 위해 용역기간을 연장‧추진코자 함

□ 용역개요

❍ 용역명 : 혜화, 명륜동 일대 지구단위계획 수립용역

(혜화, 명륜 성곽마을 재생계획 수립 포함)

❍ 용역사 : ㈜온공간연구소(대표 장옥연)

❍ 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 22 (2차년도)

❍ 계약금액 : 478,100천원

□ 추진현황

❍ `15. 5.  7   : 설계변경 계약

- 혜화, 명륜 성곽마을 재생계획(주거환경관리사업계획) 내용 포함

❍ `15. 5. 27   : 성곽마을 재생사업 주민설명회 개최

❍ `15. 6.~11. : 주민워크숍 (12회)

- ’15. 6 ~ 7 중동호흡기증후군(메르스) 발병으로 주민워크숍 잠정 중단

❍ `15. 8. 3    : 중간 보고 (본부장)

❍ `15.11.20   : 마중물사업인 시민누리공간 주민공모사업 협약체결

□ 설계변경(안)

❍ 설계변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	’15.03.01~’15.12.22	’15.03.01~’16.05.06	약 4.5개월 연장
용 역 비	478,100천원		변경 없음
용역업체	㈜온공간연구소		변경 없음

❍ 용역기한 연장사유

- 계약변경(’05.05.07)을 통해 성곽마을 재생계획수립이 추가된 상황으로 주민중심으로 계획이 수립되는 특성상 효과적 과업진행을 위해서 필요한 절대기한 부족

※ 다른 성곽마을 재생계획은 통상 1년을 용역기간으로 하고 있음.

- 중동호흡기증후군(메르스) 발병으로 주민워크숍이 2개월 정도 잠정 중단되어 일정이 지연

- 과업에 포함된 생활문화자료조사에 포함된 마을의 4계절 경관기록을 위해 서는 기존 과업기간에 없는 겨울과 봄 경관의 추가적인 조사기간 필요

□ 향후계획 : 역사도심재생과 용역계약 변경(연장) 의뢰

붙임   계약상대자 요청공문 (합의각서 포함) 1부.  끝.