문서번호	시설과-9006
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
송창선		김한준	12/03 이용태
협조
	조경팀장		남상국

남산공원 노후쉼터 정비공사

준공기한 연기 검토보고

2015. 12

중부공원녹지사업소

시설과

『남산공원 노후쉼터 정비공사』

준공기한 연기 검토보고

“남산공원 노후쉼터 정비공사”와 관련 시공사로부터 준공기한 연기요청서가 접수되어 아래와 같이 검토보고 합니다.

공사개요

❍ 공 사 명 : 남산공원 노후쉼터 정비공사

❍ 공사기간 : ‘15.10.27 ~ 12.05

❍ 도 급 액 : 114,432,900원

❍ 도 급 자 : 세신조경주식회사 (대표: 서종원)

검토사항

❍ 준공기한 연기요청[세진조경 2015-36호(‘15.12.03)]

- 가을장마로 실작업시간 부족하여 공기부족(11월 우천기간 - 14일)

- 데크B 설치 위치가 높아 작업기간 늘어남

❍ 준공기한 연기(14일)

- 당초 : 2015. 10. 27 ~ 12. 05

- 변경 : 2015. 10. 27 ~ 12. 19

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

검토결과

❍ 가을장마로 인한 작업중단과 작업여건에 따른 공기연장 건으로, 상기와 같이 공사기간을 연기하여 공사시행에 철저를 기하고자 함

붙임 : 준공기한 연기요청 공문 1부.  끝.