소방정보ㆍ통신장비 구입설치(공사) 감독일지
전산통신과-6575				담당자	정보통신팀장	전산통신과장	결재
				남성의	주종옥	12/03 강경철
공정 내용	진척공정	68.2%	진척주요추진사항
	금주공정	68.2%	금주주요 추진사항	- 영상저장 SW 시험운영 - 영상공유 SW 시험운영 - 재난영상공유SW 설치 및 테스트 - 영상관리SW 설치 및 테스트 - 중앙관제SW IP매트릭스 기능 설치 및 테스트
◎ 금주 작업내용 (~11.27) ▪ 사업관리 - ▪ 하드웨어 - 하드웨어 부문 설치 완료 및 인코더/디코더 설정 진행 - 기존 영상공유 시스템 연결 및 대체 구동 운영 진행 ▪ 소프트웨어 - 영상공유 설정완료 및 시험운영 개시 / 영상저장 소프트웨어 설정완료 및 시험운영개시 - 영상관리 소프트웨어 센터 설치 및 디버깅 진행 - 재난영상공유 소프트웨어 센터 내 설치 및 디버깅 작업 진행 - 중앙관제 소프트웨어 IP 매트릭스 기능 센터 설치 및 디버깅 작업 진행 / 상황판 소프트웨어 GUI 통합 협의 ▪ 설치공사
금주투입인원 - 정보통신팀 : 소방교 남성의 - (주)에스디시스템 : 이호근 부장, 고진현 과장, 구성모 팀장, 이경태, 안재원, 박광순, 김지상, 김영찬
◎ 특기사항 - 주요하드웨어 설치 및 설정 완료 - 영상저장 / 영상공유 소프트웨어 디버깅 작업 완료 및 시험운영 개시 - 영상관리 / 재난영상공유 소프트웨어 센터 설치 및 디버깅 작업 개시 - 중앙관제솔루션 IP매트릭스 기능테스트 및 디버깅 작업 ◎ 차주 업무예정 - 영상저장 / 영상공유 소프트웨어 시험운영 및 관찰 - 영상관리 / 재난영상공유 소프트웨어 운용테스트 및 디버깅 작업 - 중앙관제솔루션 IP매트릭스 기능테스트 및 상황판 소프트웨어와 GUI 통합 개발작업