함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	용역 설계변경시행(2015년 반포배수지외 9개소 배수지청소용역)

1. 우리사업소에서 시행중인 “2015년 반포배수지외 9개소 배수지청소용역”에 대하여 다음과 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 반포배수지외 9개소 배수지 청소용역

나. 계 약 자 : 태명종합건설  대표  황 명 애

나. 계약기간 : 2015. 4. 28 ～ 2015. 12. 31

라. 변경금액

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
용역비	280,595,145	246,059,000	(감)34,536,145

마. 변경사유 : 보험료 정산 및 청소물량 감소에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선교체비,기타

교체비(배수지 물탱크청소)

따로붙임 : 1. 설계변경 관련서류 각1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝. 추산필 2015.12.3. No2

주무관	윤복철		주무관	김정규		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	12/03 정경효
협조자
시행	시설관리과-26668	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4891	/전송	02)3146-4939	/	yun2113@seoul.go.kr	/	대시민공개