투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	(주)태성종합건설 대표 이광석 귀하
(경유)
제목	2015년 도로시설물 세척용역 4차 작업일정 변경지시

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소와 ′15.4.23. 용역계약 체결하여 시행중인 「2015년 도로시설물 세척용역(남부)」에 대하여 4차 작업지시 하였으나, 우천 및 강설 등의 기상상황 변화로 세척일정을 변경하오니, 시민불편 사항이 최소화 될 수 있도록 탄력적으로 작업을 진행하여 주시고, 제반사항 준비에 만전을 기하여 안전하고 원활한 작업이 진행될 수 있도록 최선을 다하여 주시기 바라며,

3. 아울러, 기온 급강하시 세척 후 노면결빙 우려가 있으니 제설재를 살포하여 안전사고를 미연에 방지하여 주시고, 기상상황(우천 및 강설 등) 변화로 안전사고 위험 등 세척효과가 미비할 경우 세척일정이 순연될 수 있으니 이점 양지하시기 바랍니다.

가. 세척 일정

ㅇ 당  초

- 2015. 12. 2. : 수출의다리고가, 동작지하차도

- 2015. 12. 3. : 영등포지하차도, 선암지하차도

ㅇ 변  경

- 2015. 12. 8. : 영등포지하차도, 선암지하차도

- 2015. 12. 9. : 수출의다리고가, 동작지하차도

나. 변경사유

ㅇ 기상상황(우천 및 강설 등) 변화로 안전사고 위험 등 세척효과 미비.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정성오		시설보수과장	12/03 代정규용
협조자
시행	시설보수과-4663	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 남부도로사업소	/
전화	3284-5467	/전송	836-3093	/	somc0855@seoul.go.kr	/	대시민공개