문서번호	시설관리과-26612
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		송근호	12/03 정경효
협 조

용역 설계변경 시행보고

(2015년 반포배수지외 9개소 배수지 청소용역)

2015. 12

강남수도사업소

용역 설계변경 시행보고

「2015년 반포배수지외 9개소 배수지청소용역」에 대하여 설계변경 사항이 발생하여 설계변경 심의위원회의 심사를 완료하였기 설계변경 시행코자 함.

용 역 개 요

❍ 용 역  명 : 2015년 반포배수지외 9개소 배수지 청소용역(연간단가)

❍ 용역 개 요 : 청소면적 322,210㎡, 약품사용면적 58,976㎡

❍ 용역 기 간 : 2015. 4. 28. ~ 2015. 12. 31

❍ 용역금액 : 금280,595,145원

❍ 계약업체 : 태명종합건설  대표 황 명 애

설계변경 근거 및 주요 세부내용

❍ 설계변경 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

❍ 주요 세부내용

- 보험료 정산 증감 사항 발생(감)

․ 국민건강, 국민연금, 노인장기요양, 산재 및 고용보험

- 청소면적 증감 사항 발생(감)

․ 삼성배수지(신설) 미통수로 상반기 청소 미실시 면적 : 19,621㎡(감)

․ 항출입구 전실청소 1개소(감)

설계변경 금액내역                                       (단위 : 원)

구 분		당초 금액	변경 금액	증 ․ 감
총 용 역 금액		280,595,145	246,059,000	-34,536,145
	공 급 가 액	255,086,496	223,690,000	-31,396,496
	부가 가치세	25,508,649	22,369,000	-3,139,649

따로붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.

설계변경 심의위원회 개최결과

❍ 심의일시 : 2015. 12. 1(화) 10:00

❍ 심의장소 : 강남수도사업소 시설관리과(4층)

❍ 위 원 장 : 시설관리과장  송근호

- 심의위원 : 시설관리과(이재윤,이춘기), 급수운영과(박종태,이승우)

- 간    사 : 시설관리과 (윤복철)

❍ 심의내용

- 설계변경 타당성 여부 : 타당함

- 물량 증감사항 적정여부 : 타당함

- 제잡비 적정 산정 및 적용여부 : 타당함

- 각종 제반규정 준수여부 : 타당함

조치의견

❍ 자체 설계변경 심의결과 설계변경함이 적정하여 따로붙임 설계내역서에 의거 설계변경 시행하고, 계약부서인 본청 재무과에 변경계약 의뢰코자 함.

따로붙임 : 1. 설계변경 심의의견서 각 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.  끝.