투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사」 설계변경 시행

『보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사

2. 공사기간 : 2015. 11. 9 ~ 12. 10

3. 총공사비 : 18,676,500원

4. 도 급 자 : ************

5. 설계변경사유 : 현장여건에 따른 물량증감 및 신규공종발생

6. 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		18,676,500	30,640,000	11,963,500
도급비	공 급 가 액	16,978,636	27,854,545	10,875,909
	부가가치세	1,697,864	2,785,455	1,087,591
	계	18,676,500	30,640,000	11,963,500

7. 예산과목

- 기  존 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화 지원,  서울숲공원 시설물 정비, 시설비

【품의번호 207(2015.10.20.)】

- 증액분 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화 지원,  보라매공원 시설물 정비, 시설비

【품의번호 251(2015.12.1.)】

붙임 : 1. 변경설계서(갑지, 내역서, 수량산출서)  1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

주무관	최지효		주무관	代최지효		시설과장	12/03 진병규
협조자	주무관	지정희		주무관	이전호
시행	시설과-6183	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02-2181-1195	/전송	02-2181-1199	/	charity3@seoul.go.kr	/	부분공개