문서번호	교통운영과-23661
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
문기영		유승효	12/04 강진동
협조

2015년 횡단보도 기본 및 실시설계 용역대상 추가 보고

2015. 12.

도시교통본부

(교통운영과)

2015년 횡단보도 기본 및 실시설계 용역대상 추가 보고

보행자의 이동 편의 증진을 위한 횡단보도 설치로 사람이 우선하는 걷고 싶은 도시 서울을 조성코자 『2015년 보행불편해소를 위한 횡단보도 설치사업』추진 중 변경사항이 있기에 보고드림

□ 사업근거

□ 행정2부시장 사업추진 방침 제265호(2008.6.3.)

□ 2015년 횡단보도 확충․정비 추진계획(교통운영과-4591호, ’15.03.10)

□ 도로교통법 시행규칙 제11조(횡단보도의 설치)

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 2015년 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비 사업

□ 사업대상 : 백제공영주차장 입구 등 20개소

□ 사업기간 : ’15. 1. ~ ’15. 12.

□ 사 업 비 : 1,813,800천원(시비)

□ 사업내용

- 횡단보도 노면표시, 신호기 설치, 보도 턱 낮춤, 교통안전표지 설치

- 가로수, 가로등, 한전분전함, 소화전 등 보행지장물 이설

【기본 및 실시설계 용역 개요】

· 용 역 명 : 2015년 보행불편 해소를 위한 횡단보도 설치 기본 및 실시설계 용역

· 용역대상 : 백제공영주차장 입구 등 60개소

· 용역규모 : 기본설계 30개소, 실시설계 20개소, 모니터링 10개소

· 사업기간 : ’15. 5. 11. ∼ ’15. 12. 30.

· 계약금액 : 91,380천원

· 계약업체 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소  대표 김 동 수

□ 변경사항

□ 변경물량 : 당초 60개소 → 변경 84개소(증 24개소)

□ 변경사유

- 사전 기본설계 및 교통안전시설 심의를 통한 원활한 ’16년 횡단보도 확충정비 사업 조기 추진

‣ 민선6기 시장정책 공약 ‘대각선횡단보도 확대’ 조기달성(9개소)

‣ 사람중심의 ‘걷는 도시, 서울’ 조성을 위한 도심권 전방향 횡단보도 설치(신규사업, 11개소)

- 설계용역발주 후 횡단보도 설치 수요증가 및 민원발생(4개소)

□ 추가지점 및 내용

연번	위치	주소	개선내용	비고
1	문현초등학교 앞 교차로	송파구 충민로 137	대각선횡단보도 설치	시책사업
2	잠실초등학교 앞 교차로	송파구 올림픽로35길 20	대각선횡단보도 설치	시책사업
3	거여5단지아파트 앞 교차로	송파구 양산로4길 16	대각선횡단보도 설치	시책사업
4	송파체육문화회관 앞 교차로	송파구 양산로 15	대각선횡단보도 설치	시책사업
5	나정순쭈꾸미 앞 교차로	동대문구 약령시로 65	대각선횡단보도 설치	시책사업
6	천호초교 입구 교차로	강동구 구천면로 304	대각선횡단보도 설치	시책사업
7	성내초교 입구 교차로	강동구 풍성로 96	대각선횡단보도 설치	시책사업
8	등촌근린공원 앞 교차로	강서구 강서로62길 48	대각선횡단보도 설치	시책사업
9	계남초교 앞 교차로	양천구 목동동로2길 54	대각선횡단보도 설치	시책사업
10	동서울우편집중국 앞	광진구 자양로 75	단일횡단보도 1면 신설	민원
11	동대문역사문화공원역교차로(을지로7가우체국R)	중구 을지로 284	교차로 서측 1면 신설	민원
12	궁동삼거리	구로구 신정로 59	단일횡단보도 1면 신설	민원
13	전농삼성아파트 앞	동대문구 전농로 192	교차로 북측 1면 신설	민원
14	청운초교 앞 교차로	종로구 자하문로 101	교차로 남측 1면 신설	도심권
15	청운실버센터 앞	종로구 자하문로28길 29	교차로 북측 1면 신설	도심권
16	종로프라자약국 앞	종로구 자하문로 63	교차로 북측 1면 신설	도심권
17	새마을금고 광화문본점 앞	종로구 자하문로 37	교차로 남측 1면 신설	도심권
18	정부서울청사 창성동별관 뒤	종로구 효자로 37	교차로 남측 1면 신설	도심권
19	안국동사거리	종로구 우정국로 69	교차로 서측 1면 신설	도심권
20	종로구청입구 교차로	종로구 종로 14	교차로 서측 1면 신설	도심권
21	한화갤러리 뒤	중구 세종대로 92	교차로 서측 1면 신설	도심권
22	도동삼거리	중구남대문로5가440	교차로 남측 1면 신설	도심권
23	써미트호텔 앞	중구 장충단로 198	교차로 남측 1면, 북측 1면 신설	도심권
24	국립극장 교차로	중구 장충단로 60	교차로 남측 1면 신설	도심권

□ 조치계획

□ 횡단보도 확충정비 사업대상 조정으로 민원해결 및 보행불편 해소

- 원만한 시 현안사업 추진 및 서울시민의 보행불편 해소를 위해 기존 사업대상지점 조정

□ 설계용역 과업대상 조정(계약금액 변동없음)

- 상기와 같이 설계용역 과업대상을 조정하여 2015년 횡단보도 확충정비 사업 추진에 만전을 기함

붙임 : 2015년 횡단보도 확충정비 대상지점 변경현황 1부.  끝.

□ 2015년 횡단보도 확충 ‧ 정비 대상지점 현황

연번	지 점 명	지 점 위 치	개 선 내 용	비 고
1	백제고분공영주차장 입구	송파구 방이동 125	단일 1면 신설
2	낙성대역 앞	관악구 인헌동 1632-2	단일 1면 신설
3	상일여고 앞 사거리	강동구 상일로 21	교차로 남측 1면 신설
4	연희동 대우아파트 입구	서대문구 연희동 353-89	교차로 북측 1면 신설
5	신은초교 앞	양천구 신정동 1319	교차로 서측 1면 신설
6	숯내교 앞	강남구 자곡동 50-9	교차로 서측 1면 신설
7	대흥동 3-108 앞	마포구 대흥동 3-108	단일 1면 신설
8	한국양봉농협 본점 앞	중구 신당동 370-61	단일 1면 신설
9	사당역 교차로	동작구 사당1동 1042-1	교차로 북측 1면 신설
10	새마을금고 서빙고동점 앞	용산구 동빙고동 89-5	단일 1면 이설
11	명일초등학교 앞	강동구 암사1동 418-18	단일 1면 신설
12	잠실2동 주민센터 앞	송파구 올림픽로 159	단일 1면 신설
13	난향초등학교 앞 삼거리	관악구 난향동 668-11	교차로 북측 1면 신설
14	종로5가역 교차로	종로구 동호로 407	교차로 동측 1면, 서측 1면 신설
15	세곡동주민센터 앞	강남구 율현동 278-1	단일 1면 신설
16	충무로역 교차로	중구 필동1가 30-1	교차로 서측 1면 신설
17	가양9단지 911동 앞	강서구 허준로 234	횡단보도 확폭
18	가양9단지 907동 앞	강서구 허준로 234	횡단보도 확폭
19	가양도시개발9단지 902동 앞	강서구 허준로 224	횡단보도 확폭
20	한산초등학교 앞 교차로	강동구 둔촌2동 149	교차로 동측 1면 신설
21	강일중학교 앞 교차로	강동구 암사3동 414-16	교차로 서측 1면 신설
22	국사봉터널 남측	관악구 성현동 490-20	단일 3면 신설
23	삼성산주공아파트 앞 삼거리	관악구 신림동 산87-17	교차로 서측 1면 신설
24	청계5가교차로(마전교)	종로구 종로5가 398-3	북측 1면, 남측 1면 신설
25	청계천로 버들다리교차로	종로구 종로5가 410	북측 1면, 남측 1면 신설
26	청계6가교차로(오간수교)	종로구 창신동 440-10	북측 1면, 남측 1면 신설
27	청계8가교차로(황학교)	동대문구 신설동 109-13	북측 1면, 남측 1면 신설
28	시설관리공단교차로(고산자교)	성동구 마장동 523-1	북측 1면, 남측 1면 신설
29	안국동 교차로	종로구 관훈동 154-1	교차로 서측 1면 신설

연번	지 점 명	지 점 위 치	개 선 내 용	비 고
30	방배대우효령아파트 앞	서초구 효령로 84	교차로 서측 1면 신설
31	수서경찰서 교차로	강남구 개포동 12-4	대각선횡단보도 설치
32	신림교 사거리	관악구 신림로58길 25	대각선횡단보도 설치
33	현대시장교차로	관악구 양녕로 49	대각선횡단보도 설치
34	청계초,중원중학교앞교차로	노원구 중계동 511-3	대각선횡단보도 설치
35	공릉초교후문 앞 교차로	노원구 공릉동 598-17	대각선횡단보도 설치
36	평제약국 앞 교차로	동대문구 제기동 1193	대각선횡단보도 설치
37	경원중학교사거리	서초구 잠원동 66-1	대각선횡단보도 설치
38	장미아파트 교차로	송파구 신천동 11-4	대각선횡단보도 설치
39	문정중학교 교차로	송파구 문정동 12-1	대각선횡단보도 설치
40	경동초교 앞 교차로	성동구 성수동1가 14-78	대각선횡단보도 설치
41	중곡역 사거리	광진구 중곡동 273-2	대각선횡단보도 설치
42	대원외고 입구 사거리	광진구 중곡동 266-3	대각선횡단보도 설치
43	구로디지털단지우체국 앞 교차로	구로구 구로동 188-35	대각선횡단보도 설치
44	구로구청구의회 교차로	구로구 구로동 65	대각선횡단보도 설치
45	왕십리역 앞 교차로	성동구 행당동 168	대각선횡단보도 설치
46	청과물시장(농협)사거리	영등포구 영등포6가 145	대각선횡단보도 설치
47	우리벤처타운2사거리	영등포구 문래3가 82	대각선횡단보도 설치
48	서울의료원교차로	중랑구 신내로 156	대각선횡단보도 설치
49	문정초등학교 교차로	송파구 문정로5길 20	대각선횡단보도 설치
50	고척중 교차로	구로구 고척동 52-357	대각선횡단보도 설치
51	청계천로 광교교차로(광교)	종로구 우정국로 2	대각선횡단보도 설치
52	청계천로 청계7가교차로(다산교)	종로구 창신동 436-73	대각선횡단보도 2면 설치
53	청계천로 영도교교차로(영도교)	중구 청계천로 370	대각선횡단보도 2면 설치
54	청계천로 비우당교교차로(비우당교)	성동구 상왕십리동 12-45	대각선횡단보도 2면 설치
55	청계천로 청계9가교차로(무학교)	성동구 하왕십리동 286-2	대각선횡단보도 2면 설치
56	상도터널입구삼거리(노들역)	동작구 노량진로 248	횡단보도 3면 신설
57	법원정문 교차로	서초구 서초대로 269	단일 1면 신설
58	시청 옆	중구 세종대로 119	단일 1면 신설
59	서울비전빌딩 앞	강남구 언주로 621	단일 1면 신설
60	고척교회 앞 교차로	구로구 중앙로 79	단일 1면 신설

연번	지 점 명	지 점 위 치	개 선 내 용	비 고
61	문현초등학교 앞 교차로	송파구 충민로 137	대각선횡단보도 설치	추가
62	잠실초등학교 앞 교차로	송파구 올림픽로35길 20	대각선횡단보도 설치	추가
63	거여5단지아파트 앞 교차로	송파구 양산로4길 16	대각선횡단보도 설치	추가
64	송파체육문화회관 앞 교차로	송파구 양산로 15	대각선횡단보도 설치	추가
65	나정순쭈꾸미 앞 교차로	동대문구 약령시로 65	대각선횡단보도 설치	추가
66	천호초교 입구 교차로	강동구 구천면로 304	대각선횡단보도 설치	추가
67	성내초교 입구 교차로	강동구 풍성로 96	대각선횡단보도 설치	추가
68	등촌근린공원 앞 교차로	강서구 강서로62길 48	대각선횡단보도 설치	추가
69	계남초교 앞 교차로	양천구 목동동로2길 54	대각선횡단보도 설치	추가
70	동서울우편집중국 앞	광진구 자양로 75	단일횡단보도 1면 신설	추가
71	동대문역사문화공원역교차로(을지로7가우체국R)	중구 을지로 284	교차로 서측 1면 신설	추가
72	궁동삼거리	구로구 신정로 59	단일횡단보도 1면 신설	추가
73	전농삼성아파트 앞	동대문구 전농로 192	교차로 북측 1면 신설	추가
74	청운초교 앞 교차로	종로구 자하문로 101	교차로 남측 1면 신설	추가
75	청운실버센터 앞	종로구 자하문로28길 29	교차로 북측 1면 신설	추가
76	종로프라자약국 앞	종로구 자하문로 63	교차로 북측 1면 신설	추가
77	새마을금고 광화문본점 앞	종로구 자하문로 37	교차로 남측 1면 신설	추가
78	정부서울청사 창성동별관 뒤	종로구 효자로 37	교차로 남측 1면 신설	추가
79	안국동사거리	종로구 우정국로 69	교차로 서측 1면 신설	추가
80	종로구청입구 교차로	종로구 종로 14	교차로 서측 1면 신설	추가
81	한화갤러리 뒤	중구 세종대로 92	교차로 서측 1면 신설	추가
82	도동삼거리	중구남대문로5가440	교차로 남측 1면 신설	추가
83	써미트호텔 앞	중구 장충단로 198	교차로 남측 1면, 북측 1면 신설	추가
84	국립극장 교차로	중구 장충단로 60	교차로 남측 1면 신설	추가