투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	신상도 지하차도 확장공사 준공기한 연기의뢰

우리본부에서 시행중인『신상도지하차도확장공사』의 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신상도지하차도 확장공사

나. 도 급 비 : 총괄 11,722,115,000원,

다. 공사기간 : 총괄 2007.12.31 ~ 2015.12.31

라. 시 공 사 : (유)한백종합건설 외 1개사

마. 준공기한 연기 내역

구 분	준 공 기 한		비 고
	당 초	변 경
총괄	2007.12.31. ~ 2015.12.31.	2007.12.31. ~ 2018.12.31.	증 3년

바. 준공기한 연기사유

- 주변에서 추진중인 지구단위계획과 연계 추진을 위하여 준공기한 연기

사. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

아. 지체상금부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송민영		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	12/04 임춘근
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-16394	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8762	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개