투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2016년 한강공원 주차장 공휴일 유료화 추진 관련 사용료 원가계산 용역

1. 공원기획과-3757(2015.12.03.)호 관련입니다.

2. 「2016년 한강공원 주차장 공휴일 유료화 추진 관련 사용료 원가계산 용역」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

계 약 현 황	용 역 명	2016년 한강공원 주차장 공휴일 유료화 추진 관련 사용료 원가계산 용역
	계약상대자	한양대학교 에리카산학협력단 (대표 : 이기형)
	계 약 일 자	2015.11.24.
변 경 내 역	내 용	계약기간 변경, 계약금액 변경 없음
	변경사유	주차장 실사 등 용역범위 확대에 따른 완수기한 연장
기 간 변 경	변경전 착수일자	2015.11.24	변경후 착수일자	2015.11.24
	변경전 완수일자	2015.12.03	변경후 완수일자	2015.12.14
금 액 변 경	변 경 전	1,960,000 원
	변경금액
	변 경 후	1,960,000 원

붙     임 : 1. 계약보증금지급각서 1부

2. 준공기한연기의뢰서 1부

2. 변경계약의뢰서 1부. 끝.

주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	12/04 이상국
협조자
시행	총무과-20573	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개