투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(방음벽 추가 설치에 따른 실정보고 승인 알림)

1.업무지시현장 :  남부순환로(개봉역주변) 구조개선 (주)동명기술공단종합건축사사무소, 남부순환로(개봉역주변) 구조개선 (주)케이에스씨건설

2.작 성 일 자 : 2015-12-04 00:12:00

3.지 시 내 용

가. 남부감 제15-440호(2015.11.30.) 및 토목부-25756호(2015.12.4.)와 관련임.

나. “남부순환로(개봉역앞)구조개선공사”와 관련하여 개봉 삼호아파트앞으로 이전된 버스정류장으로 인하여 분진, 소음 및 쓰례기 무단투기 등 생활 불편 해소를 요구하는 민원이 지속적으로 제기되어 방음벽을 추가로 설치하고자 실정보고한 사항에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인 통보하오니 증액되는 공사비에 대하여는 본부 설계변경 자문회의(소위원회) 심의결과에 따라 설계변경에 반영하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송 처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					12/04 진재섭
협조자
시행			토목부-25832									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개