문서번호	교통운영과-23700
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		신호시설팀장		교통운영과장
박지웅		김균호		전결 12/04 강진동
협 조

『세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역』

준공기한 연기(2차) 보고

2015. 12

도시교통본부

교통운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

「세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리 용역」

준공기한 연기(2차) 보고

세곡2지구 보금자리주택지구 조성 전기 및 교통신호등공사(원인자 공사)의 선행공정(토목)지연 및 추가규제로 인한 준공기한 연기에 따른 당해 공사감리용역의 준공기한을 연기하고자 합니다.

Ⅰ		용역개요

용역개요

【단위 : 원】

용역명	용역기간	공사비	계약금액	계약업체	비고
세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역	′13.09.24. ~ ′15.12.15.	648,000,000	69,532,500	대영유비텍㈜ 대표 조근환	공사비 (감리비 산출대상)

※ 공사비 : 용지비, 보상비, 법률수속비 및 부가가치세를 제외한 일체의 공사비

Ⅱ		준공기한 연기

준공기한 연기 내용

구분	준공기한			비고
	변경전	변경후	증감일
세곡2지구 보금자리주택지구 교통신호기공사 감리용역	2015.12.15.	2016.05.31.	증)168

준공기한 연기 사유

준공기한 연기 사유 : 세곡2지구 교통신호등 공사의 선행공정(토목) 지연 및 추가규제로 인한 준공기한 연기에 따른 공사감리용역의 준공기한을 연기하고자 함.

준공기한 연기 세부내용

세곡2지구 보금자리주택지구 조성 전기 및 교통신호등공사 변경계약 내역

공사명	계약내역				비고
	변경전		변경후
	계약일	준공기한	계약일	준공기한
세곡2지구 교통신호등공사	2013.03.21.	2015.12.03.	2013.03.21.	2016.05.31.	증)168일

향후계획

재무과로 변경계약 의뢰

붙임  감리용역계약변경 검토보고서 및 합의각서 각1부.  끝.