문서번호	정보통신보안담당관-21961
결재일자	2015.12.4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		통합보안관제팀장	정보통신보안담당관
임종학		도찬구	12/04 박웅수
협조

- 서울시 통합보안관제센터 기반환경 구축공사 -

준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
자체방침	재무과	공사준공정산	계약변경 완료	234백만원

2015. 12.

정보통신보안담당관

(통합보안관제팀)

- 서울시 통합보안관제센터 기반환경 구축공사 -

준공검사 결과보고

2016년 7월 S-FLEXCENTER 서울시 통합보안관제센터의 성공적 이전을 위한 케이블트레이 확장, 통신․전원 설비 신설 등 사전 기반환경 구축공사에 대한 준공검사 결과보고임.

□ 사업개요

❍ 공 사 명 : 서울시 통합보안관제센터 기반환경 구축공사

❍ 계약기간 : 2015. 9. 24 ~ 12. 22 (60일간)

❍ 계약금액 : 금234,316,000원

❍ 계 약 자 : ㈜넥슨정보통신

❍ 공사내용

1) 통합배선설비

- 광케이블 포설 12core×198m, FDF 광분배함 설치 24core×12대

- UTP 케이블 포설 5,040m, 패치판넬 설치 24port×24대

2) 케이블트레이 확장 및 덕트 설치

- 통신 : (300mm×100mm)×80m, (500mm×100mm)×34m

- 전기 : (300mm×100mm)×86m

- 알루미늄 덕트 : (150mm×100mm)×20m

3) CCTV 배관·배선 및 카메라 취부

- UTP 케이블 포설 1,774m

- 금속제 가요 전선관 16mm×209m, 28mm×68m

- CCTV 카메라 취부 28대

4) 시스템실 랙 전원공사

- 전원케이블 포설 944m

- 전원 콘센트 32개(16개랙 × 2개)

□ 준공검사

❍ 준공일자 : 2015. 11. 22

❍ 검사기간 : 2015. 12. 2 ~ 12. 3

❍ 검 사 자 : 통합보안관제팀장 도찬구, 담당주무관 임종학

❍ 검사방법 : 현장 점검, 성능테스트 및 성과물 검사

케이블트레이 및 케이블 포설 확인	FDF 함체 및 패치패널 설치 확인	CCTV 카메라 취부 상태 확인

❍ 검사결과 : 공사설계도서 및 품질관리기준에 적합하게 시공됨.

❍ 성과물

- 공사 사진첩

- 사업완료 준공도서(준공도면, 케이블 선번장, 자재 내역서 등)

- 2016년 서울시 통합보안관제센터 이전대비 현장 실사보고서 등

□ 행정사항

❍ 상기와 같이 『서울시 통합보안관제센터 기반환경 구축공사』에 대하여 준공처리하고 그 결과를 재무과에 통보

□ 향후계획

❍ 공사 준공검사조사 작성 및 제출	: ´15.12.07

❍ CCTV, FMS 구매설치 준공	: ´15.12.11, ´15.12.24

❍ 통합보안관제 이전 사업 발주	: ´16.01 ~

붙 임	: 1. 준공내역서 1부.

2. 준공도면 1부.

3. 자재검수 요청 및 승인서 1부.

4. 공사사진첩 1부.

5. 서울시 보안관제시스템 이전 실사보고서 1부.  끝.