함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2015 북악터널 배수지외 13개소 항청소 용역)

1. 우리사업소에서 시행중인『2015년 북악터널배수지외 13개소 항청소용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 북악터널배수지외 13개소 항청소용역

나. 계약상대자 : 태명종합건설  대표자 황영애

다. 공사기간 : 2015.05.11 ~ 2015.12.31

라. 계약금액

구 분	당 초	변 경	비 고
총 공 사 비	395,614,790	363,440,000
도 급 액	395,614,790	363,440,000

마. 계약금액 변경사유 : 신규공종 및 사급자재, 계약물량 증․감

바. 공사개요 : 별첨 설계서 참조

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

기타교체비,(배수지(항)청소)

붙임문서 : 1. 설계변경 심의회 개최 및 결과 보고관련서류 1부. 끝.

주무관	신정우		주무관	함현준		급수운영과장	代김홍준		서부수도사업소장	12/04 代이희세
협조자
시행	급수운영과-27265	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	3146-3651	/전송	3146-3689	/	sjwoo67@seoul.go.kr	/	부분공개(7)