문서번호	설비부-15583
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
조기성	임현근	12/04 박기형

『양천주민편익시설 증축 및 리모델링 기계설비공사』

설계변경(총차1회, 2차1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시기반시설본부

(설비부)

양천주민편익시설 증축 및 리모델링 기계설비공사

설계변경(총차1회, 2차1회) 검토보고

『양천주민편익시설 증축 및 리모델링 기계설비공사』와 관련하여 감리단으로부터 제출된 설계변경(총차1회, 2차1회) 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 양천주민편익시설 증축 및 리모델링 기계설비공사

○ 위    치 : 양천구 목동 900번지

○ 공사규모 : 지하3층/지상3층, 연면적 5,841㎡

○ 공사기간 : 2014. 12. 15. ~ 2016. 06. 14.(2차 : ~ 2015. 12. 10.)

○ 도 급 액 : 2,321,729,800원(2차계약금액 : 577,485,300원)

○ 시 공 사 : 보라이앤씨(주) 외1 / 건설사업관리 : 엄앤드이종합건축사

Ⅱ		관 련 근 거

○ 설비부-15383(2015.12.02.)  : 기계설비공사(2차) 실정보고 승인 통보

○ 양천2015-162(2015.12.04.) : 설계변경(총차,2차) 내역서 제출

Ⅲ		설계변경 주요내용

○ 공사물량 조정(공조배관 공사)

○ 폐기물 처리비 반영

○ 건설기계대여금 지급보증서 발급수수료 반영

○ 보험료(건강,연금,노인장기요양) 및 퇴직공제부금비 등 미집행사항 정산

Ⅳ		검 토 내 용

○ 설계변경 세부내용

구 분	당 초	변 경	금액증감 (직접비)
공사내역 조 정	▷ 공조배관 공사 - 배관 39m	▷ 공조배관 공사(잔여차수 반영) - 배관 60m	(증) 1,345천원
폐 기 물 처 리	▷ 폐기물처리 미반영	▷ 폐기물 처리 반영 - 유리솜 및 폐보온재 : 200㎥	(증) 12,500천원
경 비	▷ 건설기계대여금지급보증서 발급 수수료 미반영	▷ 건설기계대여금지급보증서 발급 수수료 반영	(증) 1,095천원
보 험 료 정 산	▷ 보험료(건강,연금,노인장기요양), 퇴직공제부금 미집행	▷ 보험료 등 미집행에 따라 정산 처리	(감) 13,845천원

○ 도급비 변경내용

구 분	당 초	변 경	증감액
총차 1회	2,321,729,800원	2,336,941,000원	증 15,211,200원
2차 1회	577,485,300원	577,485,300원	변경없음

○ 감리원 검토의견

현장여건과 설계 미반영 사항, 보험료 정산 등을 반영하여 설계변경과 계약변경을 추진하고 건설기계대여금지급보증서 발급수수료는 3차계약에 반영하는 것이 적정하다고 판단됨.

Ⅴ		보고자 의견

감리 검토 보고내용이 타당함으로 설계변경 처리하고 관련부서에 통보

하고자 함.

따로붙임 1. 감리 설계변경 검토보고서  1부.

2. 변경설계서(총차1회, 2차1회)  1부.       끝.